문서번호	설비부-30402
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김봉수		김현기	10/17
			김호성
협조

『서울시네마테크 건립 전기공사』

준공기한 연장 검토 보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시네마테크 건립 전기공사』

준공기한 연장 검토 보고

서울시네마테크 건립 전기공사(총차, 2차)의 준공기한 연장에 대한 건설사업관리단 실정보고를 검토 후 보고드림

1		관 련 근 거

□ 계약금액 조정 및 준공기한 연장 검토 보고 *****************************

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장제8절(2. 계약기간의 연장)

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고 ************************

2		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 전기공사

□ 공사위치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

□ 공사규모

- 수변전설비(950kVA), 비상발전설비(500kVA), 자동제어(전력, 조명)설비

□ 계약현황

구 분	차 수	계약금액	계약기간	계약업체
전 기	총 차	**************	***********************	******
	2 차	************	***********************

- 건설사업관리단 ***************************

3		검 토 내 용

□ 준공기한 연장

구 분	차수	당 초	변 경	증 / 감
공사기간	총차	***********************	***********************	********
	2차	***********************	***********************	*******
공사금액*	총차	***************	***************	***************
	2차	*************	*************	****

************************************************************

□ 연장사유

- 선행 공종의 공정지연으로 인한 전기공사(총차, 2차) 준공기한 연장

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금 : 미부과

□ 건설사업관리단 의견

- 선행 공종(건축공사)의 공정이 지연됨에 따라 후속 공종인 전기공사의 준공기한을 연장하여 시행함이 적정하다고 판단됨

□ 조치계획

- 건설사업관리단의 검토보고가 적합하다고 판단되므로 전기공사(총차, 2차) 준공기한 연기에 대한 실정보고를 승인하고,

- 계약부서(총무부)로 전기공사(총차, 2차) 계약변경(준공기한 연기, 물가변동으로 인한 계약금액 조정)을 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.