문서번호	시설관리과-33527
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
조영범	양창진	유명은		10/17
				신정철
협 조

(신정증압장 모터펌프 제작구매 설치)

납품기한 연기 검토 보고

2022. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

「신정증압장 모터펌프 제작구매 설치」

납품기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인 「신정증압장 모터펌프 제작구매 설치」건에 대한 납품기한 연기 사유가 발생하여 검토한 결과를  보고드림

□ 사업개요

사업명	용 량	사업비 (단위:천원)	납품기한	계약상대자
신정증압장 모터펌프 제작구매 설치	30HP×2대	118,030	'22.04.22. ~ '22.10.19.	하지공업(주) (대표:이권화)

※ 장소이전 신규설비 설치 후 기존 노후설비 철거

□ 연기사유

○ 모터펌프 설치는 완료하였으나 신정증압장 이전 설치에 따른 인한 전력선      및 제어판넬 설치, 유량계 이전설치로 인한 공사기간 확보필요

○ 전기 및 제어설비 설치완료 후 안정적인 가동상태 확인을 위한 시험운영      기간 확보 및 시험운영 완료 후 기존 펌프설비 철거을 위한 공사기간 필요

□ 지체상금 부과여부

○ 귀책사유 : 강서수도사업소

○ 지체상금 : 미부과

□ 조치의견

○ 상기와 같이 검토한 결과 기한 내 납품이 불가하므로 효율적인 업무       수행을 위하여 아래와 같이 납품기한을 연기하고자 함.

사업명	납품기한		계약상대자	비 고
	당 초	변 경
신정증압장 모터펌프 제작구매 설치	'22.04.22. ~ '22.10.19.	'22.04.22. ~ 22.11.30.	하지공업(주) (대표:이권화)	계약금액 변동없음

붙임 : 합의서 1부.  끝.