아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리용역 총차, 3차)

1. 우리부에서 시행 중인「반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리용역(총차, 3차)」에 대해 다음과 같이 설계변경 및 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리용역

나. 용 역 비 : 금107,813,000원 (3차 금58,190,000원)

다. 용역기간 : 2018.04.30. ~ 2022.10.31. (3차 2021.01.30. ~ 2022.10.31.)

라. 계 약 자 : (주)하경엘씨, 백상기업(주)

마. 설계변경 내역(※ 용역기간 변경 없음)

용 역 비	당 초	변 경	증·감
총 차 분	************	************	************
3 차 분	************	************	************

- 변경사유 : 공사기간중 실반출된 수량 정산반영

바. 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 강남역 일대 침수방지, 시설비 및 부대비 (예산편성 부서 : 치수안전과)

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 감리단 검토의견서 및 설계변경 내역서 (합의각서 포함) 1부. 끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	김재건		치수시설과장	代송민섭		방재시설부장	10/17
이동훈
협조자
시행	방재시설부-28859	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8765	/	elvis1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)