“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(신정증압장 모터펌프 제작구매 설치 관련)

1. 시설관리과-33527(2022.10.17)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 신정증압장 모터펌프 제작구매 설치건과 관련하여 아래와      같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 신정증압장 모터펌프 제작구매 설치

[계약번호 : 2022041228B00]

나. 계약상대자 : 하지공업(주) (대표:이권화)

다. 계약금액 : 118,030,000원(금일억일천팔백삼만원)

라. 연기사유 : 신정증압장 장소이전 설치에 따른 전기 및 유량계이설 등 추가 공정                    발생에 따른 공사기간 확보를 위함

마. 변경내역(계약기간) : 계약금액 변경없음

- 당 초 : 2022. 4. 22. ~ 2022. 10. 19.

- 변 경 : 2022. 4. 22. ~ 2022. 11. 30.

붙임 : 1. 납품기한 연기검토 보고서 1부.

2. 변경계약 합의서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	조영범		기전팀장	양창진		시설관리과장	10/17
유명은
협조자
시행	시설관리과-33534	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	0bum@seoul.go.kr	/	부분공개(5)