더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2022년 북한산근린공원(19지구) 조성사업(긴급) 설계변경 시행

우리구에서 추진하고 있는『2022년 북한산근린공원(19지구) 조성사업(긴급)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 2022년 북한산근린공원(19지구) 조성사업(긴급)

2. 사업내용 : 건물 철거, 수목이식 및 신규 식재, 시설물 설치 등

3. 사업기간 : 2022. 5. 3. ~ 2022. 10. 21.

4. 도급금액 : 금194,019,900원(금일억구천사백일만구천구백원)

5. 도급업체 : 원택건설㈜ 대표 오원진(광진구 천호대로 597, ☎02-498-5471)

6. 변경사유 : 보고서별첨

7. 도급비 증감내역                                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감 액	비 고
도 급 비	194,019,900	198,780,000	증 4,760,100

8. 예산과목 : 공원조성과, 생활권공원 확충, 도심공원 확충, 생활밀착형 공원 조성,

시설비및부대비, 시설비(시비)

붙임  1. 설계변경사유서, 변경내역서 각1부.

2. 검증확인서, 설계변경 검토보고서 각1부.  끝.

주무관							김남주				공원기획담당					김성기					공원녹지과장					代김성기					도시관리국장						10/18 이창구
협조자				계약담당							신정경					재무과장							강은주
시행			공원녹지과-22123										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3663							/전송			02-2241-6565					/	01024206765@sb.go.kr													/	부분공개(5)