문서번호	전시과-24367
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	10/19
			代고중석
협 조

「서울시립과학관 2022년 신규 체험전시물 제작·설치」

준 공 검 사   결 과 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

서울시립과학관

(전   시   과)

「서울시립과학관 2022년 신규 체험전시물 제작·설치」

준 공 검 사   결 과 보 고

「2022년 서울시립과학관 이동형 과학체험 전시물 제작」이 완료됨에 따라 준공검사를 실시하고, 그 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제15장 물품계약 일반조건

❍ 제8절 이행의 완료와 대가 지급(1. 물품의 검사)

□ 검사원 지정 요구서(서울시립과학관 2022년 신규 체험전시물 제작·설치)

총무과-25934(2022.10.18.)

2		사 업 개 요

□ 계 약 명 : 서울시립과학관 2022년 신규 체험전시물 제작·설치

□ 위    치 : 서울시립과학관 상설전시실(서울특별시 노원구 한글비석로 160)

□ 계약기간 : 2022.5.23. ~ 2022.10.18.

□ 계약금액 : ****************************

□ 계약업체 : ****************

□ 주요내용 : 작동형 체험 전시물 5종 및 전시시설 구축 및 보강

3		추 진 경 위

□ `22.03.16.          : 추진계획 수립(협상에의한계약 추진)

□ `22.04.01.          : 입찰공고

□ `22.04.29.          : 제안서 평가위원회 개최

□ `22.05.23.          : 계약체결

□ `22.05.27.~08.11.  : 과업착수, 전시물 설계 및 중간보고(3회)

□ `22.08.12.         : 설계보고회 개최

□ `22.10.18.         : 전시물 납품 완료 및 과업 준공

4		준공검사 내용

□ 과업준공일 : 2022.10.18.(화)

□ 준공검사일 : 2022.10.18.(화)

□ 준 공 금 액 : ****************************

□ 준공검사자 : ****

********************************************

***********************************

□ 준공검사 결과보고

❍ 준공검사 일정에 따라 준공검사를 실시한 결과 산출물(전시물 5종 및 전시시실 보강)이 설계도면, 시방 및 내역에 맞춰 제작되었으며, 현장 설치상태 확인결과 설치완료 및 정상작동하고, 준공청소 실시하였음

❍ 일부 전시물 작동에 있어 미흡한 부분(영상물 콘텐츠)은 검수기간(14일 이내)내 보완 수정 요함

❍ 설계도면 및 시방대로 납품 및 시공완료 하였기에 준공처리 가능함(공정율 : 100%)

5		처 리 방 안

□「2022년 서울시립과학관 이동형 과학체험 전시물 제작」계약 건의 준공검사를 완료함에 따라 본 과업을 준공처리 및 준공금 지급

□ 준공 후, 전시물의 현장 적응 및 관람객의 돌발적인 전시물 사용이 예상 되므로 이에 따라 시운전 기간 동안 지속적인 잔손보기 시행 예정

□ 시정보완 등 하자조치가 필요한 사항이 발생되면 즉각 조치하고, 하자 미조치시 하자보수예치금(보증보험증권)으로 해결

□ 전시물 소모성 부품 중 기성품에 대해서는 원활한 유지보수를 위하여 리스트 작성 후 납품

붙임 :  1. 준공검수 사진  1부.

2. 납품사진  1부.  끝.