문서번호	설비부-30609
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	10/19
			김호성
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』 설계변경(2차,3차) 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』 설계변경(2차,3차) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경(2차,3차) 사항에 대하여 검토 하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사

□ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

□ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

□ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	******	**	***********************	***********
		**	***********************	**********
		**	***********************	***********

□ *********************************

2		관련근거

□ 통신공사 설계변경에 대한 검토 보고 [제2자유입건 제2022-340호('22.10.18.)]

3		검토내용

□ 설계변경 사유

- 공정현황을 고려하여 시공 가능 여부에 따라 2차수 공사 물량과 3차수 공사 물량을 조정하여 내역 변경하기 위함.

□ 설계변경 내용

- 2차수 공사 준공기한 내에 시공 가능 부분은 2차수 공사 내역분에 반영하고, 시공 불가 부분은 3차수 공사 내역분으로 조정 반영

□ 변경금액                                                                              (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
**	***********	***********	*
**	**********	**********	*
**	***********	***********	*

□ 계약기간 변경 : 변경 없음

□ 건설사업관리기술인 검토의견

- 공정현황을 고려하여 시공 가능 여부에 따라 2차수 공사와 3차수 공사 물량내역을 조정하는 것이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 통신공사 설계변경 건에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.