문서번호	시설과-839
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
김경원	이종무	이정환	10/19
			代이인수
협 조

2023년 남산공원 산사태 예방사업 추진계획

2022. 10.

중부공원여가센터

(시   설   과)

2023년 남산공원 산사태 예방사업 추진계획

2023년 남산공원 산사태 예방사업 대상지 확정에 따라 ’23년 우기전(6월말)에 사업을 완료하여 집중호우 시 산사태 피해 등 재해를 사전에 예방하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□「산림보호법」제45조의8(산사태취약지역의 지정 및 해제)

□「사방사업법」제5조 및 제6조(사방사업의 시행)

□ 2023년 산사태 예방사업 추진계획 알림[산지방재과-1920호(‘22.10.17.)]

Ⅱ		산사태취약지역 및 추진 현황

□ 산사태 취약지역 지정 현황: 총 12개소(※붙임 1 문서 참조)

□ 최근 5년간 사업 추진 현황: 총 18개소 1,571,452천원

구분	18년	19년	20년	21년	22년	비고
개소	7	-	2	3	6
사업비 (천원)	320,029	-	409,500	454,650	387,273

※ 2022년 남산공원(북측순환로 등 5개소) 산사태 예방공사 추진현황

❍ 위    치 : 북측순환로 등 6개소(서울시 중구 예장동 산5-6 외 4개소)

❍ 사업규모

- 구조물공 : 낙석방지책 80m 및 낙석방지망 2,381㎡ 등

- 식 재 공 : 덜꿩나무. 조팝나무 식재 및 식물매트 등

❍ 공사기간 : ’22. 3. 4. ~ 6. 17.

❍ 계약업체 : ㈜삼연임업 대표 김유봉

❍ 총사업비 : 금387,273천원(설계비: 39,083천원, 공사비: 348,190천원)

Ⅲ		추진 경위

○ ‘22. 04. 05. : ‘23 남산공원 산사태 예방사업 후보지 제출

○ ‘22. 05. 13. : ‘23 남산공원 산사태 예방사업 후보지 현장조사

○ ‘22. 10. 05. : ‘23 산사태 예방사업 후보지 확정(산지방재과)

○ ‘22. 10. 17. : ‘23 산사태 예방사업 추진계획 알림

Ⅲ		2023년 산사태 예방사업 추진 개요

□ 사 업 대 상 지: *****************

□ 사 업 기 간: ‘22. 10월  ~ ‘23. 6월(우기전)

□ 소 요 예 산: **************************************

□ 세 부 현 황

연번	위 치	사업종	재해위험도 평가결과		사업내용	소요예산(단위:천원)			비고
			점수	등급		개략공사비	개략설계비 (개략공사비10%)	합계
*	********* ****** ***** *******	** ** **	**	*	************** *********	*******	******	*******
*	********* ***** ****** ******	** ** **	**	*	************** *********	*******	******	*******
*	******** ***********	** **	**	*	******** ***********	*******	*	*******	** ****** ********

***********************************************************

Ⅲ		향후 추진 계획

□ 산사태 예방사업 실시설계

○ 기  간:‘22. 10. ~ 12.

○ 실시설계 추진방향

- 사방사업 설계기준 반영

· 서울형 사방시설 설계 및 시공 기준

· 사방사업 실시설계 사전심의 검토기준 등

- 주변환경과 어울리는 사방시설 설치

· 사방시설 규모는 안전성을 우선 고려하되 가능한 자연 훼손 최소화

· 설계시 환경 관련 전문가의 자문 시행 등

○ 시행방법 : ****

○ 수의계약사유

*******************************************************************************************************

□ 산사태취약지역 지정 절차 이행

○ 시  기:‘23. 1. ~ 2.(2개월)

○ 지정자: 서울특별시장

- 심의자료 작성·요청 : 중부공원여가센터

- 심의 및 지정 공고 : 산지방재과

□ 공사 시행

○ 추진일정

- ‘23. 1.      : 계약심사 및 일상감사, 예산 재배정 요청

- ‘23. 2.      : 공사 발주 및 계약

- ‘23. 3 ~ 6. : 공사 시행 및 준공

붙임  1. 산사태취약지역 위치도 및 지정현황 1부

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.