문서번호	설비부-30556
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	10/19
			김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』관급자재 납품기한 연장에 대하여 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 정보통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
기계설비공사	(주)거람 외 2개사	총차	2020.06.29.~2022.10.14.	1,079,831,300
		2차	2021.09.15.~2022.10.14.	1,048,625,300

○ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정, (주)세움이앤씨건축사사무소

2		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 (제7절 2.계약기간의 연장)

○ 기계공사 관급자재 납품기한 연장 검토 보고 [시립CM제2022-381호 ('22.10.13.)]

3		검토내용

○ 변경내용

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	납품기한
					당초	변경(연장)
00-21-7-0228-01 12-22-2-04993-00	부스터펌프	(주)두크	총차	19,184,000	2022.10.14.	2022.12.14
00-21-7-0215-01 12-22-2-04997-00	공기조화기	(주)에스앤에이치이엔지	총차	66,743,000	2022.10.14	2022.12.14

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	납품기한
					당초	변경(연장)
00-20-7-0066-06 12-22-2-05011-00	공기순환기	(주)은성화학	총차	22,036,000	2022.10.14.	2022.12.14.
00-19-8-1574-14 12-21-2-29412-00	지열실내기	(주)엘지전자	총차	167,707,440	2022.08.09.	2022.12.14.
00-19-8-1574-20 12-22-2-29061-00	EHP 실내기		총차	22,297,930	2022.08.22.	2022.12.14.
00-19-8-1574-20 12-22-2-28724-00	GHP 실내기		총차	13,809,700	2022.08.22.	2022.12.14.
12-21-2-35544-00	엘리베이터	(주)그린엘리베이터	총차	214,650,000	2022.10.14.	2022.12.14.
202104128AC-01	T.A.B	(주)한미설비	총차	18,540,000	2022.10.14	2022.12.14.
12212100800	지열시스템	(주)제이앤지	2차	151,700,000	2022.10.14.	2022.12.14.
2021090105700	GHP실외기	구름	총차	99,698,600	2022.10.14.	2022.12.14.

○ 변경사유

- 기계설비공사 준공기한 연장에 따른 관급자재 납품기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 시립청소년 음악창작센터 건립공사 관급자재 납품설치공사의 기한연장을 검토한 결과 기계설비공사의 공사기한에 맞춰 납품기한을 연장하는 것이 적정하다고 판단됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 기계공사 관급자재의 납품기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.