문서번호	건축부-31219
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이상근		최장길	10/19
			代차무흥
협조
	주무관		이제관

「AI 지원센터 건립공사」

공사기간 연장에 따른 계측관리비용 추가 반영 검토 보고

2022. 10. 18.

도시기반시설본부

( 건 축 부 )

본 공사의 관급자재 납품 지연 등으로 공사기간이 연장되어 가시설 계측관리비에 대한 추가 반영이 필요하여 검토 보고 드림

******************************************

「AI 지원센터 건립공사」

공사기간 연장에 따른 계측관리비용 추가 반영 검토 보고

Ⅰ		관 련 근 거

□ 건축부-27316('22.08.02) : 계약변경(공사기간 연장) 보고

□ 근정 제2022-431('22.10.17) : 계측관리비 실정보고 승인 요청

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : AI 지원센터 건립공사

□ 위    치 : 서울시 서초구 태봉로 108(우면동 141)

□ 규    모 : 지하1층/지상7층, 연면적 10,020.05㎡

□ 공사기간 : 2021. 5. 14. ~ 2023. 08. 10.

□ 사 업 비 : 354.39억원(공사비 317.4억원, 감리비 20.99억원, 기타15.03억원)

□ 감리사/시공사 : 시공-대라수건설, 감리-(주)종합건축사사무소 근정

□ 위치도 및 조감도

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 사항

< 공사기간 연장 >

○ 연장 사유 :

- 관급자재 원자재 공급 불안정으로 철근 및 레미콘 납품지연 및 화물연대 파업 등으로 인한 공사 지연

- 기계실 터파기 공사중 경암 발생하여 할암공법으로 암 파쇄로 인한 공사 지연

○ 공사기간 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
총차 계약기간	'21.05.14~'23. 4.13.	'21.05.14~'23. 8.13.	증4개월
1차 계약기간	'21.05.14~'22. 8.13.	'21.05.14~'22.12.10.	증4개월

< 계측관리기간 검토 >

○ 연장 사유 :

- 상기 공사기간 연장으로 인한 계측관리비용 추가 반영(4개월)

○ 계측관리기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
계측관리기간	'21.12.24.~'22. 3.23. (3개월)	'22.12.24.~'22. 7.23. (7개월)	증4개월

※ 기간적용 적정성 : 기존 3개월 + 추가 4개월 = 7개월

< 공사비 현황 >

○ 공사비 증•감 현황

【금액단위 : 원】

**	**	**		**		***
		**	**	**	**	**	**
*****
***	**	*	*********	*	*********
*****	**	*	*********	*	*********
****	**	**	*********	**	*********
*****	**	**	*******	**	*******
*****	**	*	*******	*	*******
*****	**	**	*********	**	*********
*****	**	*	**********	*	**********	**	***********
****			**********		**********		***********
*****			*********		*********		**********
*			**********		**********		***********
*****			*********		*********		**********
*****			**********		**********		***********

※ 1개월 계측관리비 : 3,369천원(기계약단가 적용)

Ⅳ		보고자 검 토 의 견

ㅇ 상기 실정보고 사항은 공사기간 연장으로 4개월의 계측관리비용 반영에 대한 사항으로 검토한바, 적정함으로 추후 설계변경을 시행하여 내역에 반영하고자 함.

붙임  1. 공사기간 연장 검토보고서 1부.

2. 건설사업관리단 실정보고 서류 1부.  끝.