문서번호	운영총괄과-27975
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
이준범		代김기영	10/19
			이철희
협조

「한강공원 매점(광나루1호)신설 소방공사」

설계변경(정산) 검토 보고

2022. 10.

한강사업본부

(운영총괄과)

「한강공원 매점(광나루1호)신설 소방공사」

설계변경(정산) 검토 보고

「한강공원 매점(광나루1호) 신설 소방공사」와 관련하여 설계변경(보험료 정산) 요청건이 접수됨에 따라 검토후 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 한강공원 매점(광나루1호)신설 소방공사

○ 위    치 :********************

○ 공사기간 :***************************

○ 도 급 액 :***********

○ 도 급 사 : 주식회사 진명파워택

Ⅱ		추진경위

○ '21.11.04.: 한강공원 매점 신설 공사 계획 보고

○ '21.11.09.: 신규매점(광나루 1호)기본 및 실시설계 용역 준공

○ '21.11.19.: 기존 광나루 1호 매점 철거

○ '21.12.08.: 광나루 1호 소방 공사 착공

○ '22.08.02.: 준공기한 연기('22.08.04.→'22.10.31.)

Ⅲ		설계변경 검토 보고

○ 준공기한 검토: ‘21. 12. 08. ~ ‘22. 10. 31.(변경 없음)

○ 설계변경 사유

- 보험료 등 실정산 금액 반영

○ 설계변경 내역

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
직접재료비	*******	*******	******
노무비	*********	*********	******
경비	*******	*******	********
일반관리비	*******	*******	********
이윤	*******	*******	********
공급가액	*********	*********	********
부가가치세	*******	*******	********
총공사비	*********	*********	********

Ⅳ		조치의견

○ 상기와 같이기타 실정산 건에 대해 계약검증시스템 및 증빙자료를 통해 과정산된 사항이 없음을 확인하였으며, 설계변경(정산)을 시행코자 함.

붙임  설계변경(정산)내역서 1부.  끝.