더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	화랑로40길 28-10 주변 하수관로 개량공사 설계변경-제1회(최종)

우리구에서 시행중인 「화랑로40길 28-10 주변 하수관로 개량공사」 제1회(최종) 설계변경」을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 화랑로40길 28-10 주변 하수관로 개량공사

2. 공사기간 : 2022. 3. 28. ~ 2022. 10. 24.

3. 도 급 자 : (주)연일종합조경 대표 성문정

4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	721,500,000	753,727,570	증)	32,227,570
도 급 비	505,492,000	536,400,000	증)	30,908,000
관 급 비	111,480,000	120,526,570	증)	9,046,570
이 전 비	104,528,000	96,801,000	감)	7,727,000

마. 설계변경 사유 : 별첨

바. 예산과목

○ 물재생계획과, 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비[공기업특별회계(시비)]

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.

4. 관련방침서 1부.  끝.

주무관	최성호		치수담당	오강일		치수과장	김윤기		건설교통국장	10/19 김석우
협조자	계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	치수과-16920	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 치수과 (삼선동5가)	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3624	/전송	02-2241-6563	/	csh5120@sb.go.kr	/	부분공개(5)