문서번호		여성가족과-26167		주무관		출산장려다문화팀장		여성가족과장		생활복지국장	부구청장
결재일자		2022.10.19.
				최연휘		박병숙		김재옥		박규탁	10/19 이방일
공개여부		부분공개(5)
				협 조
보도여부
					기획예산과장		전혜정
	- 번3동 공동육아나눔터 확충사업 - 명시이월 계획
2022.10.19.
강 북 구 (여성가족과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
	청탁금지법	(예: 인허가 등 업무 추진 시 부정청탁, 협찬·후원 등의 명목으로 부당금품 수수 행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서: 기획예산과 )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

- 번3동 공동육아나눔터 확충사업 -

명시이월 계획

번3동 공동육아나눔터 확충사업과 관련하여 아래와 같이 명시이월 계획을 수립하여 정상적인 사업 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

추진근거:「아이돌봄지원법」제19조,「건강가정기본법」제22조

사 업 명: 번3동 공동육아나눔터 확충

확충예정지 현황

명 칭	위 치	건물규모	연면적(㎡)
번3동 공동육아나눔터	강북구 오현로 208 (번동3단지 세대복합형복지주택)	지상1층	102㎡

사업내용

❍ 자녀들의 안전한 돌봄활동을 위한 장소제공

❍ (조)부모 및 양육자에게 육아정보 나눔기회의 장 마련

❍ 도서, 장난감 등 자녀 양육 관련 물품 비치 및 상시프로그램 진행

총사업비: 178,000천원(구비)

❍ 세부현황

(단위: 천원)

세부내역	예 산 액	비 고
총계	178,000
시설비및부대비	150,000	실시설계‧공사
자산취득비	28,000	기자재 및 장난감 구입

추진경과

❍ 2019. 8. : 주민협의체를 통한 공동육아나눔터 입주시설로 결정

❍ 2019. 9. : 복지주택사업 관련 업무협약(LH, 강북구)

❍ 2021. 3. : 번동3단지 세대복합형복지주택 착공

❍ 2022. 1. : 번3동 공동육아나눔터 확충 예산편성(구비)

❍ 2022. 4. : 2023년 공동육아나눔터 신규대상지 수요 신청서 제출

Ⅱ		명시이월 내용

추진근거

❍「지방재정법」제50조제1항

❍ 2022 회계연도 세출예산 명시이월 추진 계획(기획예산과-12254, 2022. 9. 28.)

명시이월 금액: 178,000천원

세부내역                             (단위: 천원/기준일: 2022.10.17)

예산현액	품의금액	｀22년 집행액	명시이월 내역
			적요	이월금액 (=본예산-집행액)
178,000	0	0	-	178,000

명시이월 사유

❍ 번3동 공동육아나눔터 입주예정인 「번동3단지 세대복합형복지주택」에 2022년 10월 이후 인테리어 공사 및 물품이전을 LH와 사전협의 하였으나(서울도심권건축사업단-21812호, 2021. 9. 1),  최근 공사 시기에 대하여 2023년 3월말 이후 가능하다는 회신(서울도심권사업단-3149호, 2022. 9. 28.) 따라 금년 내 사업을 완료할 수 없어 명시이월 하고자 함.

예산과목

❍ 여성가족과, 여성가족의 복지증진, 가족복지향상, 공동육아나눔터 확충 및 운영, 시설비및부대비, 시설비

❍ 여성가족과, 여성가족의 복지증진, 가족복지향상, 공동육아나눔터 확충 및 운영, 자산취득비, 자산및물품취득비

Ⅲ		향 후 계 획

2023. 1월 ~ 3월         실시설계

2023. 4월	~ 6월	입찰(시공업체선정) 및 공사, 준공

2023. 7월	~ 계속	개소 및 운영

붙임  1. 명시이월 사업설명서 1부.

2. 명시이월비 이월명세서 1부.  끝.