아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(2022년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사-1차)

1. 우리사업소에서 시행중인 「2022년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행 후 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 2022년 은평구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : (주)진원이엔지 대표자 김영준

다. 계약기간 : 2022.05.31. ~ 2022.06.30

라. 설계변경 사유 : 2022년 각 공사별 예정물량의 증,감 및 신규공종에 따른 설계변경

1) 차수별 부기금액 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	총 부기금액	800,763,530	800,763,530	증감없음
	금차(2022년)	480,447,000	480,447,000	증감없음

2) 1차수 금액변경 내용(2022년도)                                                                                                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	37,526,701	42,037,349	증 4,510,648	기계터파기 등
부설공	134,357,550	128,828,350	감 5,529,200	스텐관부설공 (D=20mm) 등
구조물공	59,411,450	59,364,031	감 47,419	몰탈바르기(바닥) 등
부대공	11,293,192	11,863,139	증 569,947	하수도복구비 등
사급자재비	26,678,476	27,216,147	증 537,671	스텐레스 강관 등
포장공	3,661,541	3,661,541	-
부가세 및 요율	207,518,090	207,476,443	감 41,647
합 계	480,447,000	480,447,000	-

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후밸브)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지비,(배수지등 정밀안전진단 점검 및 시설정비(시설정비))

재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수비, 시설비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용 배급수관 정비)

붙 임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최결과보고서 1부

2. 설계변경 심의결과서 1부

3. 설계변경 요약서 1부

4. 변경 내역서 1부

5. 변경합의서 1부  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	성동제		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	10/19
代신동철
협조자
시행	시설관리과-32131	(	2022.10.19	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3693	/전송	02-3146-3739	/	pjung223@seoul.go.kr	/	부분공개(7)