투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	물가변동(2,3회) 및 준공기한 연장에 따른 계약변경 의뢰(서울시네마테크 건립 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 『서울시네마테크 건립 전기공사』와 관련하여 물가변동(2,3회)으로 인한 계약금액 조정과 준공기한 연장을 위한 계약변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계약현황

구 분		계약기간	계약금액	계약업체
전 기	총 차	***********************	**************	******
	2 차	***********************	************

2. 변경내용

구 분		계약기간		계약금액
		당 초	변 경	당 초	변 경
전 기	총 차	***********************	***********************	**************	**************
	2 차	***********************	***********************	************	****

3. 변경사유

가. 계약기간 : 선행공종(건축)의 공정지연으로 인한 준공기한 연장

나. 계약금액 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정(붙임 3-2)

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 건설사업관리단 공문 및 내역서 각 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김봉수		환경설비과장	김현기		설비부장	10/19
김호성
협조자
시행	설비부-30612	(	2022.10.19	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로124, 13층 공동주택지원과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-7294	/전송	02-2133-0755	/	bongsu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)