문서번호	동물복지1과-24377
결재일자	2022. 10. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		동물복지1과장		동물원장
박범준	황근석		代이은형		10/20
					권수완
협 조
	전략기획실장					구재성
	총무과장					김중태
	시설과장					문석기
	주무관					김진영
	주무관					고재철

호랑이사 동물출입문(미닫이문) 개선 계획

2022. 10

서울대공원

[동물복지1과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 안전한 동물사 관리를 위한 -

호랑이사 동물출입문(미닫이문) 개선 계획

동물사의 산업안전과 관련하여 작업동선의 협소함, 반복적 조작으로 인한 근골격계질환 및 안전사고 예방을 위해 호랑이사 동물출입문(미닫이문)을 안전게이트로 개선하고자 함.

□ 추진근거

◯ 산업안전점검(3월,4월) 점검 결과에 따른 동물복지1과 개선조치 계획 : 동물복지1과-2447(2021.5.24.)

◯ 서울대공원장 지시 및 요청사항(2021.6.24.)

◯ 서울대공원 동물사 출입문 개선 계획 : 시설과-5012(2021.7.20.)

◯ 호랑이사 안전게이트 설치 계획 : 시설과-21388(2022.5.9.)

◯ 「중대재해처벌에 관한 법률」 안전사고 및 관련 질환 예방

□ 현황 및 문제점

◯ 동물이 출입하는 슬라이딩문은 고중량으로 개폐가 어려우며, 반복 조작으로 근골격계 질환 발생 가능

◯ 관리통로 협소로 문 개폐 손잡이에 의한 충돌사고 발생 우려

◯ 미닫이문 틀 내부에 털, 흙 등 이물질 끼임으로 인한 관리 불편

◯ 산업안전보건 및 AZA 위해도 평가 지적사항으로 개선 필요

◯ 동물 스트레스 및 공사 중 동물 이동 문제로 일괄 개선 불가능

□ 추진내용

◯ 목 적 : 동물출입문 개선을 통한 안전성 확보

◯ 추진기간 : 2022. 10. 31.(월) ~ 11. 25.(금)

◯ 장 소 : 호랑이사 10개소

◯ 개선내용

- 호랑이 출입문 10개소 미닫이문 철거 후 안전 게이트로 재설치

- 안전게이트 내부 빗장(안전장치)을 설치하여 이중잠금 실시

- 미닫이문에서 추문으로 개선, 조작 편의성 및 관리통로 공간 확보

현재 슬라이딩문	개선 방안

□ 추진일정

◯ ‘22. 10. 24. ~ 10. 26. : 방문 및 공개견적 후 견적 비교 및 업체 선정

◯ ‘22. 10. 27. ~ 10. 28. : 계약의뢰 및 일정 협의(공휴일 및 주말 제외)

◯ ‘22. 10. 31. ~ 11. 18. : 철거 및 시공설치 진행

◯ ‘22. 11. 21. ~ 11. 25. : 준공확인

※ 동물사 사정에 따라 일정은 변경될 수 있음

□ 예산사용

◯ 소요예산 : ***************

◯ 집행방법 : 소액수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제 1항

및 제30조 제1항, 제2항

- 사유 : 동물원 상황을 고려하여, 안전하게 설계 및 시공할 수 있는          전문 업체를 선정하여 공사하고자 함.

◯ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물종보전, 동물사육관리 및 환경조성, 시설비

□ 협조사항

◯ 전략기획실 : 시설비 공사 예산 사용 협조

◯ 총 무 과 : 공사 계약사항 검토 및 계약 진행

□ 기대효과

◯ 동물사의 노후 및 위해시설 개선을 통한 안전성 확보

◯ 이중 잠금장치 및 사용의 편의성 제공을 통한 질환 예방.  끝.