아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	한전 임시 송전선로 사용기한 조건부 연장 승인 보고

1. 한국도로공사 용인구리건설사업단 공사관리2팀-2265(2022.9.30) 및 정수시설과

-24760(2022.10.20)호와 관련입니다.

2. 한국도로공사 용인구리건설사업단에서 "고속국도 제29호선 세종~포천(안성~구리

제12공구)" 건설을 위해 우리 정수센터 고도정수처리시설 확충 부지를 횡단하여

시공한 한전 임시 송전선로(미금T/L)의 사용기한을 아래와 같이 조건부로 연장

승인 하였음을 보고합니다.

가. 부지 사용기한

- 연장전 : 2020년 9월 ~ 2022년 12월

- 연장후 : 2020년 9월 ~ 2024년 8월

나. 승인조건

- 2024년말 예정된 정수센터 고도정수처리시설 확충사업이 조기에 착공될

경우 확충공사 시행에 지장이 발생하지 않도록 사전 조치

- 연장 철거 확약서에 따라 부지 연장 사용기한 만료 2개월전 임시 송전선로

철거 및 정수센터 시설물 원상복구 계획 제출

- 임시 송전선로 및 관련 시설물로 인한 우리 정수센터 시설물 피해발생 시

즉시 원상복구 조치

- 정수센터 부지 경계에 설치한 가철탑(2기) 주변 외곽 울타리 지장물 제거 등

환경정비 및 안전관리 철저.  끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장), 서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
주무관	고명규		정수시설과장	이재복		광암아리수정수센터소장	10/20
이달영
협조자
시행	정수시설과-24761	(	2022.10.20	)	접수		(		)
우	12989	하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수시설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5381	/전송	02-3146-5309	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개