실정보고 검토서[객토, 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '21.01.08. ~ '22.10.31. · 도 급 비 : 228억원				· 시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 · 감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	객토[광화문 감 제2022-671호(2022.10.17.)]
실정보고 사유	공사 추진중 녹지면적의 변경으로 녹지 객토량을 재산출하여 반영코자 함.
건설사업관리단 검토의견	당초 설계시 보다 녹지면적이 증가됨에 따라 객토 추가 공정은 타당하며, 단가 또한 적정 산정 되었음.
변경(안)	****** ******************************************************************************** ********************************************************* ********* **************************************************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당 없음
발주처 검토의견	조건부 승인 1. 시공사에서 제출한 녹지면적 2,296㎡에 대해 건설사업관리단 입회하에 녹지 면적 실검측 후 발주처에 보고, 면적이 상이할 시 정산처리 2. 객토 단가 조정: 단순 수량증감에 대한 사항으로 기존 단가 적용 ※ 신규단가 155,255원 → 기존단가 116,189원 적용
결재	주무관	신경환	공원시설과장	代권동현		방재시설부장	10/20
							代최진우
	주무관	김현곤	주무관	김규희