문서번호	급수운영과-33289
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
박상권		代박상권	10/21
			代이문성
협 조

보 고 서

(공사실정보고)

2022. 10.

북부수도사업소

[급수운영과]

보   고   서

명에 의하여 시설공단으로부터 접수된 『월계1-1 중블록 공급체계 구축공사』와 관련한 공사감독2처-11074(2022. 10. 7.)호, 공사감독2처-11821(2022. 10. 19.)호실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2022. 10. 21.

보고자 : 토목6급 박 상 권

1. 관련근거 : 공사감독2처-11074(2022.10.7.) 『공사현장 실정 보고서 제출(월계1-1중블록)』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계1-1중블록 공급체계 구축공사

나. 공사기간 : 2022. 06. 10. ∼ 2023. 01. 05.

다. 도 급 액 : 656,148,700원

라. 공사개요 : 송배급수관 부설 D=500mm  L=745m

마. 도 급 자 : (주)부경이엔씨 대표 김창호

3. 보고내용

가. 작업시간 변경(주간→야간)

- 설계시 창동 305번지 앞공사구간(80m)는 주간공사로 시행토록 설게되었으나 도봉경찰서 도로공사 신고시 경찰서에서 야간시행토록 허가됨

4. 검토의견

가. 작업시간 변경(주간→야간)

- 도봉로에 위치한 창동 305번지 앞공사구간(80m)은 주간으로 설계되었으나   도봉경찰서 도로공사 허가시 야간으로 승인된 사항으로 도봉경찰서 도로굴착신고승인사항을 반영, 설계변경(정산)시 반영함이 타당할 것으로 판단 됨

증) 약 14,100천원

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

첨부 : 관련공문 각1부.  끝.