문서번호	물재생계획과-30247
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	代박영호	10/21
		함명수

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

2022. 10.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

「양재천로23길 16 비석공원주변 오수관로 개량공사」와 관련하여 지장물 저촉으로 인한 관로 선형변경(보도→차도) 및 야간공사 시행에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 검토결과 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 공 사 명 : 양재천로23길16 비석공원 주변 오수관로 개량

○ 사업규모 : 오수관로 개량 D300~600㎜, L=992m

○ 공사기간 : 2022. 4. ~ 12.

○ 총사업비 : ***********

- *********************************************

○ 발주현황                                                         (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	************** **********	*********	*********	*******	*****	******
					****	*******
					*	*******

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 지장물 저촉으로 관로 선형변경 및 야간공사 시행

- 사업구간 : 양재동 91-6~89-5간

- 사업규모 : 오수관로 개량 D300~600㎜, L=187m

- 소요사업비 : ****************************

- 위치도 및 현장사진

Ⅳ		검토 의견

○ 공사 추진과정에서 지장물 저촉으로 관로 선형변경(보도→차도) 및 야간공사 시행이 불가피한 실정으로, 동 사업의 낙찰차액 사용을 신속하게 공사를 추진함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정 *********

구분	사업명	예산액	기배정액	금회배정액	비 고
*	************** **********	*********	*********	*******	*****	******
					****	*******
					*	*******

붙임 : 낙찰차액 사용 요청서 및 관련공문 각 1부.  끝.