문서번호	설비부-30730
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	10/21
			代장병선
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 설비공사』

TAB용역 준공기한 연장 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 설비공사』

TAB용역 준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 설비공사』와 관련하여 감리단으로부터 제출된 TAB용역의 준공기한 연장 건에 대하여 보고드림

1		사업개요

○ 용 역 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계공사 TAB 기술용역

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
T.A.B	(주)한미설비	총차	2020.04.28.~2022.10.14.	18,540,000

○ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정, (주)세움이앤씨건축사사무소

2		관련근거

○ 설비공사 TAB용역 계약기한 변경승인 요청 [시립CM제2022-405호 ('22.10.21.)]

3		검토내용

○ 연장사유 : 기계설비공사 준공기한 연장에 따라 TAB용역 준공기한 연장

○ 준공기한 변경내용

계약번호	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공기한
					당초	변경(연장)
202104128AC-01	T.A.B	(주)한미설비	총차	18,540,000	2022.10.14	2022.12.14.

○ 건설사업관리인 검토의견

- 시립청소년 음악창작센터 건립공사 T.A.B용역 계약기한변경 승인요청에 대하여 검토한 바, 용역기한을 변경함이 타당하다고 사료 됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 준공일 이후 계약 체결 사유 : 행정 업무 착오에 따른 지연

※ 업체 준공기한 연장 청구일 : 2022.10.11.

○ 손해배상증권 기간 연장 가능 여부 : 가능

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4		보고자의견

○ 건설사업관리단이 제출한 T.A.B 용역 준공기한 연장 의견이 적정하므로 승인하고 총무부에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.