문서번호	시설보수과-26051
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		임형규	10/25
			김용제
협 조
	관리단속과장			최영무

『외발산지하차도 보수공사』

실정보고 및 조치방안 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

강서도로사업소

시 설 보 수 과

『외발산지하차도 보수공사』

“실정보고 및 조치방안 보고”

금년 예산 사업으로 시행중인『외발산지하차도 보수공사』와 관련으로, 공사진행에 따른 실정보고 및 조치방안 보고 임(보수물량 증가)

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 외발산지하차도 보수공사

□ 공사기간 : 2022. 9. 16 ~ 2022. 12. 20

□ 공 사 비 : 총공사비 1,612,262,100원(낙찰차액 208,503,900원)

(도급비 : 1,575,179,100원, 이전비 : 37,083,000원)

□ 공사개요 : 기존타일철거 및 내오염도장 10,412㎡, 기타1식

□ 도 급 자 : (주)루아이앤씨 대표 조득선외1

□ 공 정 율 : 30%

Ⅱ		보 고 내 용

□ 외발산지하차도 추가 보수물량 반영 필요

○ 공사 발주시 예산부족으로 인해 전체 보수대상 물량중 일부 물량을 제외하고 발주한 상태로서,

○ 전체 타일철거후 내오염도장이 필요한 사항이므로 잔여 물량에 대하여 보수가 필요한 실정임

▶ 공사 발주물량 : 10,412㎡

▶ 보수대상 물량 : 11,100㎡(현장조사 물량)

☞ 잔여물량      : 688㎡(추가 보수대상 물량)

○ 소요예산 검토   : 약 96,220천원(별첨 검토내역서)

□ 조치방안 보고

○ 당초 공사발주시 미 적용된 물량에 대한 보수공사가 필요한 실정으로 현장조사결과 추가된 물량에 대하여 본 공사에 반영하여 공사를 진행함이 타당하다고 사료되며,

○ 추가물량 공사진행에 따라 소요되는 예산은 공사의 낙찰차액을 활용하여 진행하고자 합니다.

※ 공사 낙찰차액 활용 : 96,220천원

Ⅲ		향 후 계 획

□ 외발산지하차도 보수공사의 원활한 추진을 위해 공사발주시 미적용된 물량을 포함하여 우선 공사를 진행토록하고, 향후 설계변경시 현장 확인후 추가된 물량을 반영하여 정산하고자 하며,

□ 감독부서인 서울시설공단에 추가 작업지시하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

○ 타일철거 및 내오염도장

▶ 시공물량 : 당초) 10,412㎡ => 변경)11,100㎡(증 688㎡)

▶ 향후 실제 시공물량 실측하여 설계변경시 정산조치

따로붙임  1) 공사현장 실측자료 1부.

2) 변경물량 검토내역서 1부.  끝.