문서번호	설비부-30860
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	10/25
			김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사(2차)』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사(2차)』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관련, 건설사업관리단으로부터 현장여건 변경 및 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 등에 대한 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	***** ***** *****	**	**************************	*************
		**	*************************	*************

○ 건설사업관리단 : *************************

2		관련근거

○ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영 요청 [청소년정책과-15502('21.09.15.)]

○ 전기공사 실정보고 사항에 대한 검토 보고 [시립CM 제2022-412호 ('22.10.24.)]

3		검토내용

○ 조명기구 수량 변경

- 운영자(서경대학교) 요청사항으로 음향실, 합주실 등 건축 인테리어공사 반영에 따른 각 실별 흡음 및 차음을 위한 천장 부분의 조명방식 변경 필요

- 건축 실 구획 변경 및 천장 구조 변경에 따른 조명기구 수량 변경 필요

○ 주요 변경내역

- 도급공사 변경내역                                        (단위: 천원)

공 종	변 경 내 용	변 경 사 유	변 경 금 액 (직 접 비)
****	************	*********************** *************************	*************
**** **	************	*********************** *************************	************
*************			***********

- 관급자재 변경내역                                        (단위: 천원)

품 명	규 격	수 량 (개)			변 경 금 액
		당 초	변 경	증·감
*****	********	***	**	*********	************
	********	**	**	*********
	********	**	**	*********
	********	***	***	*********
	*********	**	**	*********
	********	**	**	*********
	********	***	***	*********
	********	**	***	*********
	********	**	**	*********

○ 관급자재(실내조명등) 납품기한 연장

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당초	변경
*************** ******************	********	****	**********	***********	***********
*************** ******************	********	****	**********	***********	***********
*************** ******************	********	*****	**********	***********	***********

- 연장사유 : 전기공사 준공기한 연장에 따른 관급자재 납품기한 연장

- 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현장여건 및 운영자(서경대학교) 요청사항을 반영하여 변경 시공함이 타당하다고 판단되며, 실정보고에 대한 검토 결과 적정함.

- 전기공사 준공기한 연장에 따라 공정에 맞춰 관급자재 납품기한 연장이 적정하며, 시공에 필요에 필요한 관급자재 검토결과 적정한 바, 변경 구매 요청함.

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고,  수량 변경 및 납품기한 연장이 필요한 관급자재는 계약부서(총무부)에 변경 구매 의뢰하고자함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.