문서번호	운영과-25790
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	운영부장
김성준	오근	10/25
		백기영

북서울미술관 공조시스템 개선 공사 3차 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

북서울미술관

(운영과)

북서울미술관 공조시스템 개선 공사 3차 실정보고 검토보고

'북서울미술관 공조시스템 개선 공사' 건과 관련하여, 도급사에서 제출한 실정보고서(3회) 감독 검토내용에 대해 아래와 같이 승인하고자 함.

□ 관련근거

○ 공사현장 실정보고서(3차) 승인 요청 [북서울미술관 공조시스템 개선 공사]

(서울시설공단 공사감독3처-9677호, 2022.10.24.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 북서울미술관 공조시스템 개선 공사

○ 공사기간: 2022. 7. 1. ~ 10. 28.

○ 공사금액: 금83,527,130원(금팔천삼백오십이만칠천일백삼십원)

○ 시 공 사: (주)엠제이이엔씨 대표 박상훈(감독자: 서울시설공단 ***)

□ 실정사항

○ 배관공사: 밸브 보온 내역 반영 요청

○ 물량내역: 실제 시공물량 추가반영 요청

□ 검토내용

○ 밸브 보온 및 시공물량 내역 반영 승인

□ 행정사항

○ 공사감독기관인 서울시설공단에 공사현장 실정보고서(3차) 승인통보

- 실정보고에 따른 개략공사비 ********************************** 증액

붙임  1. 시공사 실정보고서(3차) 1부.

2. 변경(개략)내역서 1부.  끝.