문서번호	도시철도토목부-28682
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	10/27
			류용열
협 조
	주무관			유원하
	주무관			배상현
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」 예비준공검사(4차) 결과보고

2022. 10

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」 예비준공검사(4차) 결과보고

진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사(4차)에 대하여 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2022-5813호(’22.10.26)

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 98,450백만원 (4차공사 ********원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (4차공사 ’22.1.1.∼’22.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 예비준공검사 현황

ㅇ 일   시 : 2022년 10월 25일(화)

ㅇ 장   소 : 진접선1공구 회의실 및 현장

ㅇ 예비준공검사자 : 도시철도토목부 유원하, 배상현

ㅇ 예비준공검사 입회자

- 본  부 : 공사관리관(장대성, 김봉성)

- 건설사업관리단

· 기술지원건설사업관리기술자(********)

· 책임건설사업관리기술자(***)

- 시공사 : 현장대리인(***)

□ 4차공사 추진현황

ㅇ 공사기간 : '22.01.01 ~ '22.12.31

ㅇ 계약금액 : 금*********

ㅇ 공 정 률 : 81.3%

ㅇ 4차공사 추진현황

구 분		단위	4차공사								비고
			당 초		변경예정		기시공 ('22.10.18까지)		잔여공사 (~'22.12.31)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
단선 터널	터널굴착	㎥	22,117	*****	26,580	*****	25,129	*****	1,451	***	'22.11 완료예정
	숏크리트 타설	㎥	2,495		3,094		2,787		307
	락볼트 설치	개	3,849		4,859		4,547		312
	강관다단 보강	공	165		255		180		75
수직구	카리프트 운영 외	식	1	***	1	***	1	***	1	**	'22.12 완료예정
복선 터널	터널굴착	㎥	39,080	*****	95,348	*****	84,268	*****	11,080	*****
	숏크리트 타설	㎥	2,718		5,600		5,112		488
	락볼트 설치	개	3,879		7,871		7,460		411
	라이닝 타설	㎥	9,177		8,790		918		7,872
	강관다단 보강	공	656		656		656
중간 신호실#2	터널굴착	식	-	- -	409	**	409	**	-	-	완료
	숏크리트 타설	식	-		34		34		-	-
경사갱	우회갱 굴착 외	식	1	***	1	***	1	***	-	-	완료
인입선 종점부	갱구부 토공	식	1	***	1	***	1	***	-	-	완료
터널 부대공	기계전기설비 외	식	1	*****	1	*****	1	*****	1	***	'22.12 완료예정
가설공	가설사무실 외	식	1	***	1	***	1	***	1	***
부대공	부지임대료(터널) 외	식	1	***	1	***	1	***	1	**
차량기지	차량기지 토공 외	식	1	***	1	***	1	***	1	**
	초기우수처리시설
직접공사비				******		******		******		*****
제경비(간접노무비 및 보험료)		식	1	*****	1	*****	1	*****	1	***
P.S(암매각대금 공제 외)		식	1	****	1	****	1	****	1	***
물가변동비(K1=4.16%,K2=3.01%)		식	1	*****	1	*****	1	*****	1	***
공사비 계				******		******		******		*****

□ 예비준공검사자 의견

ㅇ 잔여공사에 대해 계약공기내 마무리 될 수 있도록 공정관리 철저

- 라이닝 콘크리트 타설 일정관리 철저

ㅇ 현장 안전 및 품질관리 철저

- 터널내 작업 근로자 안전을 위해 환기시설 관리 철저

ㅇ 회계년도 폐쇄기간을 고려 설계변경 등 관련업무 철저

□ 조치계획

ㅇ 상기 보고내용에 대해 책임건설사업관리기술자로 하여금 4차공사 준공에 차질없이 공정 및 품질관리에 대하여 철저를 기하도록 조치코져 함.

붙임  예비준공검사 서류 1식.  끝.