문서번호	기전과-27268
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		석대창	10/27
			차창훈
협조
	주무관		이태근

『2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(1구역)』

실정보고에 대한 검토 보고

2022.10.

남부도로사업소

[기 전 과]

『2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(1구역)』

실정보고에 대한 검토 보고

2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(1구역)와 관련하여 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고(관급자재 물량 변경)에 대한 검토 결과를 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(1구역)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관내

□ 공사내용 : 교통사고 잦은 지점 내 교통신호기 개선

○ 교통신호제어기 신설 2개소

○ 신호지주 교체 15본

○ 교통신호시 철거 및 이설, 전원, 신호선 배선 공종 등

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : ㈜대웅전기 대표 김두식

□ 계약기간 : ***************************

□ 책임감리업체 : ㈜대영유비텍

Ⅱ		실 정 보 고

□ 주요 물량 증⦁감 내역

○ 책임감리원 실정보고 검토 결과 공사 현장 지장물(복개박스, 통신맨홀, 우수관로)등 으로 인한 지주 규격 변경 필요

순번	위치	규격	구분	단위	수량			변경사유	비 고
					당초	변경	증·감
1	*****	***********************	**	*	*	*	**	********************************
		***********************	**	*	*	*	*

□ 책임감리원 기술검토 의견

○ 2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(1구역)와 관련, 현장여건을 반영하여 실제 시공물량의 변경이 필요하다고 판단됨.

Ⅲ		보 고 자 의 견

□ 실정보고에 대한 검토 결과

○ 현장 여건에 따른 지주 규격 변경이 필요하다고 판단 되며,

○ 위 사항 등에 따른 물량변경 사항을 현장에 맞게 변경하는 것이 타당하므로 책임감리원으로부터 제출된 공사 실정보고에 대해 승인 및 관급자재 변경 구매 실시 하고자 함.

붙임  책임감리원 실정보고서 1부.  끝.