문서번호	치수과-24308
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김태규		代이성연	10/27
			박상보
협조	총무과장		代유문선
	기획예산과장		김영창

2022년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

설계변경(3회) 시행 보고

2022. 10.

한강사업본부

시  설  부

2022년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

설계변경(3회) 시행 보고

『2022년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)』의 설계변경(3회) 시행 계획에 대하여 보고 드림

□ 사업개요

ㅇ 공사명 : 2022년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 위  치 : 한강공원 전역(나들목, 제방, 수중보 등)

ㅇ 사업기간 : 2022. 2. 16. ~ 12. 31.

ㅇ 도급비 : ***********

ㅇ 계약상대자 : ***************

ㅇ 공사개요

- 콘크리트 단면처리 930㎡, 콘크리트 단면복구 50㎡, 보강토블록 쌓기 300㎥, 시설물세척 491,000㎡, 한강공원 침수피해 뻘 제거, 기타 부대공 1식 등

□ 설계변경 개요

ㅇ 관련근거

- 태풍‘힌남노’관련 한강공원 침수피해에 따른 긴급 뻘 제거 완료 보고

[본부장 방침 치수과-23457호(＇22.9.20.)]

ㅇ 설계변경 사유

- 태풍 힌남노 북상에 따른 집중호우(팔당댐 방류)로 인한 11개 한강공원 침수피해에 따른 긴급 뻘 제거 작업 결과 반영

- 실 시공물량에 따른 블록 설치 및 쌓기 수량 조정

ㅇ 9월 뻘처리 투입 현황

**	*********				*********
	**	**	**	**	****	***
*****	***	***	***	**	**	***
*****	*****	*****	*****	***	***	*****

ㅇ 직접공사비 변경

(단위: 원)

공 종	수량	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	증·감
******* *******	*	*	***********	***********	**********	***********	************
			***********	***********	**********	***********
*****	*	*	******	*******	******	*******	*
			******	*******	******	*******
******	*	*	***********	***********	**********	***********	*
			***********	***********	**********	***********
******	*	*	***********	***********	***********	*************	*************
			***********	***********	***********	*************

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위: 원)

구 분	당 초	변경	증·감	비 고
****	*************	*************	*************
*****	*************	*************	*************

□ 조치계획

ㅇ 한강공원 침수피해에 따른 긴급 뻘 제거로 공사의 시급성을 감안 물량 조정하여 공사 추진함이 타당하다고 판단됨

ㅇ 상기와 같이 설계변경을 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

ㅇ 변경계약 시행 요청(치수과 → 총무과)

- ************************

*****************************************************

붙임 : 1. 관련 보고서 1부.

2. 변경 내역서(3회) 1부.

3. 설계변경 제비율 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.