아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장) 공사기간 연장 요청

1. 방재시설부-29397(2022.10.28.) 관련입니다.

2. '새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)' 관련, 개장 후 시설추가에 대한 실정보고

및 설계변경 등의 사유로 공사기간을 아래와 같이 연장코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기간: 2020. 12. 30. ~ 2022. 10. 31.(당초)

2020. 12. 30. ~ 2022. 11. 30.(변경) / 증 1개월

**********************************************

***********************************************

*****************************************

붙임  1. 관련 방침서 1부.

2. 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	신경환		공원시설과장	이병호		방재시설부장	10/28
이동훈
협조자
시행	방재시설부-29398	(	2022.10.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8683	/전송	02-3708-8756	/	shinkh1987@seoul.go.kr	/	부분공개(5)