문서번호	시설과-1069
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
최규철	하종식	10/28
		김달용
협 조

「어린이대공원 야외동산 재정비 사업」

공사실정사항에 따른 검토보고(3차)

2022. 10.

동부공원녹지사업소

[ 시    설    과 ]

「어린이대공원 야외동산 재정비 사업」

공사실정사항에 따른 검토 보고(3차)

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 어린이대공원 팔각당 야외동산 재정비 사업

도 급 액 : 금313,918,000원

공사기간 : 2022. 07. 04. ~ 2022. 11. 30.

도 급 자 : (주)단풍나무  대표 김종호

Ⅱ		실정보고 검토내용

추진근거

- 주간 공정회의(매주 목)

- '공사 실정사항(3차) 승인요청'[시설공단 공사감독3처-9867(2022.10.27.)

발주처 및 공원관리기관 요청사항의 반영

구분	요청사항	반영결과	비 고
시설물	□ 스탠드(목재상판)의 이용자 편의를 위해 '랜덤형 설치 → 1·3·5열 설치'로 변경	▶목재상판의 설치위치 변경에 따른 물량 변경 • 목재상판(W600, 부켈라) : 67.7 → 75m	승인
	□ 개비온 날개벽 내측에 계획된 보조난간은 기능적·미적 저해가 우려되어 제외	▶보조난간 설체 제외 • 안전난간(H1100×L1500) : 22 → 0경간
	□ 스탠드 중앙 핸드레일 디자인 변경에 따라 기존 자재 설치 제외 및 변경자재의 추가설치	▶핸드레일 변경 • 핸드레일(양방향H1000×W900) : 0 → 15경간 • 핸드레일(단방향H1000×W900) : 0 → 47경간
	□ 야외무대 상부에 위치한 넓은 공간의 이용자 휴게여건 개선을 위해 개비온 상부 목재앉음판 추가설치	▶목재상판 물량 변경(증) • 목재상판(W600, 부켈라) : 0 → 7.3m

구분	요청사항	반영결과	비 고
식재공	□ 야외무대 좌측 사면부 구조물 완충 및 경관개선 위한 조경석 화단설치에 따라 식재계획 수립 및 적용	▶수목식재 물량 변경 • 산수유(H3.0×R12) : 3 → 0주 • 산수유(H2.5×R8) : 0 → 3주 • 조팝나무(H1.0×W0.5) : 0 → 170주 • 황매화(H1.0×W0.4) : 0 → 150주 • 흰말채나무(H1.0×W0.4) : 0 → 100주 • 박태기(H1.0×W0.3) : 0 → 70주 • 좀작살(H1.2×W0.4) : 0 → 70주 • 자산홍(H0.3×W0.3) : 0 → 200주 • 남천(H1.0×3지) : 0 → 80주	승인
관급 자재	□ 관급자재(핸드레일) 계약변경	▶관급자재 계약변경 • 핸드레일(양방향H1000×W900) : 13.2m → 취소	승인

Ⅲ		공사비 증감(가산정)

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)				증 감 (당초대비)	비 고
		당 초	전전회(1회)	전회(2회)	금회(3회)
도급비	공급가액	285,380,000	316,527,273	298,245,455	316,472,728	증)31,092,728
	부 가 세	28,538,000	31,652,727	29,824,545	31,647,272	증)3,109,272
	소계	313,918,000	348,180,000	328,070,000	348,120,000	증)34,202,000
관 급 비		23,020,400	23,357,294	23,357,294	19,984,827	감)3,035,573
총 공 사 비		336,938,400	371,537,294	351,427,294	368,104,827	증)31,166,427

※ 상기내용은 개략적인 물량과 금액이며 시공 시 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항은 설계변경 시 반영

Ⅳ		조 치 의 견

상기 검토 내용을 감독처에 승인 및 통보하고 공사 속행, 향후

설계 변경·정산하여 사업 진행

붙 임 : 실정보고 공문 등 각1부.