문서번호	환경녹지과-1605
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	녹지관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
진덕성	윤희권	代윤희권	10/28
			이용남
협 조
	재무팀장		전선훈

『2022년 하반기 월드컵공원 위험수목 정비 공사』 설계변경 사항 및 준공(정산) 보고

2022. 10.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

『2022년 하반기 월드컵공원 위험수목 정비 공사』 설계변경 사항 및 준공(정산) 보고

2022년 하반기 월드컵공원 위험수목 정비공사 시행 중 발생한 설계변경 사항과 제경비 정산 결과를 아래와 같이 보고합니다.

공사개요

❍ 공 사 명: 2022년 하반기 월드컵공원 위험수목 정비공사

❍ 기    간: 2022. 9. 28. ∼ 2022. 11. 6.(40일간)

❍ 위    치: 서울시 마포구 상암동 482-49호 일대

❍ 내    용: 위험수목 93그루 제거 및 가지치기 2그루

❍ 도 급 비: ************

❍ 도 급 자: ************

설계변경 사항

위 치	변 경 사 항		직접공사비 증액(원)
	당 초	변 경
*			**********
*************	**************	************** *******************************	**********
************	************	************ *********************	********

정산내용

구 분	정 산 내 용	증·감 액
*		*************
*****	********************** ***********************************	*************

구 분	정 산 내 용	증·감 액
*****	********************** ***********************************	**************
****** ***	************************** *************************************	************
********	************************* ***********************************	**********
*******	********************* ************************************	*************
*******	************************ *************************************	*************
*****	********************** *********************************	***********

준공(정산) 금액

(단위:원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	설계변경 및 정산	증·감
총 공 사 비		95,050,280	**********	*********	*
도급액	공 급 가 액	86,409,346	**********	*********	*
	부가가치세	8,640,934	*********	*******	*
	계	95,050,280	**********	*********	*

보고자 의견

○ *********************************************************************

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부

2. 설계변경(정산)내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 계약금액조정(정산) 금액 합의서(별첨) 1부.  끝