문서번호	기전과-29763
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박요셉		10/28
		김은덕
협조

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  10. 21. (금)

동부도로사업소

(기전과)

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 계획 보고

우리사업소 동부2구역(송파구, 강동구)에서 관리하는 교통안전시설물의 유지보수공사를 시행하기위해 작업지시(4차)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		교통안전시설물 설치 현황

2022. 1. 1. 기준

구 분	교통신호기						비고
	신호제어기 (대)	신호지주 (본)	신호등 (조)	음향신호기(대)	잔여시간 표 시 기 (대)	보 행 자 작동신호기 (대)
계	469	3,278	7,134	1,859	1,963	80
송파구	258	1,821	3,940	1,024	1,078	44
강동구	211	1,457	3,194	835	885	36

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2022. 3. 24. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : *****************

□ 계약금액 : ********************************

□ 감리업체 : *************

3		작업지시 계획

□ 사 업 명 : 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 작업차수 : 작업지시 4차

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 2022. 11. 30.(수)

□ 작업지시 금액 : ********************************

□ 작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
1	교통관리과-11271 (2021.5.28.)	송파구 가락동 30	경보등 철거 3본 및 신호기(차/보)신설 8본	한미약국
2	교통관리과-5384 (2022.3.15.)	잠실대교남단	신호기(차/보) 및 보행자작동신호기 신설 2대	잠실대교남단 접속램프
3	교통관리과-6830 (2022.3.31.)	강동구 아리수로 98길	차량신호등 1면 3색-> 4색 교체 2조	강일초교
4	교통관리과-5113 (2022.3.11)	송파구 삼전동 85-7	보행자작동신호기 신설 2대	쌍용하이츠빌라앞
5	교통관리과-5113 (2022.3.11)	송파구 잠실동 353	보행자작동신호기 신설 2대	잠실유수지앞
6	교통관리과-5113 (2022.3.11)	송파구 잠실동 135	보행자작동신호기 신설 2대	잠실우성아파트
7	응답소 (20220903809412)	강동구 천호동301-36	교통신호제어기 교체 1대	동신목재합판
8	응답소 (20220715900078)	강동구 상일동 535	교통신호제어기 교체 1대	강명초교사거리
9	강동구청 교통행정과-80264 (2022.8.23.)	강동구 암사동 414-17	경보등 이설 1대	강일중후문(경보)
10	응답소 (20220728804176)	송파구 송파대로280-2	신호맨홀 뚜껑 교체 1대	가락시장동문(연등)
11	신호운영실(2022.7.9)	강동구 풍성로 106	잔여시간표시기 교체 1대	성내초교
12	신호운영실(2022.7.14)	강동구 천호대로1237	긴급출동(배선점검)	길동프라자아파트
13	응답소 (20220806900102)	강동구 성내동 413-7	보행신호등1면2색 교체 1조	둔촌동역(연등)
14	경정비순찰	송파구 마천로89	차량신호등1면4색 교체 1조, 긴급출동(배선점검)	동양시스템
15	신호운영실 (2022.8.9)	송파구 석촌호수로 78	잔여시간표시기(숫자형) 교체 1조, 음향신호기 본체 1대, 압버튼 교체 1대	트레지움서문
16	삼전지구대 (2022.8.12.)	송파구 삼전동 62	보행신호등 1면 3색 교체 1조	삼전동주민센터
17	신호운영실 (2022.8.12)	송파구 문정로 217	잔여시간표시기(도형형) 교체 1조	명성스텐
18	신호운영실 (2022.8.15)	송파구 위례성대로 68	잔여시간표시기(도형형) 교체 1조	한성백제박물관
19	경정비순찰	송파구 잠실동 115	잔여시간표시기(도형형) 교체 1조	아주초교
20	강동경찰서 (2022.8.18)	강동구 길동 462	보행신호등1면2색 교체 1조	강동성심병원입구
21	응답소 (20220818900215)	송파구 백제고분로 425	잔여시간표시기(숫자형) 신설 2조	송파초교
22	신호운영실 (2022.7.6)	송파구 동남로 159	음향신호기 본체 2대,압버튼2대 교체, 케이블교체	개롱근린공원
23	응답소 (20220720804147)	강동구 선사로20	음향신호기 본체 1대 교체, 압버튼1대 교체	천호대교남단 진입램프
24	응답소 (20220815900061)	강동구 길동 367-1	음향신호기 본체 1대 교체	천동초교입구(연등)
25	경정비순찰	강동구 명일동 60	신호맨홀 단차조정	한영중고교앞

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
26	유선민원(2022.8.30)	강동구 암사동 413-3	배선점검 긴급출동	암사3동주민센터
27	송파구청(2022.8.31)	송파구 오금동 4-13	케이블 철거	올림픽선수촌아파트
28	신호운영실(2022.9.1.)	송파구 토성로 78	음향신호기 본체 1대 교체, 압버튼1대 교체	풍납사거리
29	신호운영실(2022.8.24)	강동구 구천면로 275	배선점검 긴급출동	천일초교(연등)
30	응답소 (20220906900466)	강동구 고덕동 501-5	배선점검 긴급출동, 음향신호기 본체 1대, 버튼 1대 교체	광문고교
31	응답소 (20220906806211)	송파구 오금로 306	보행신호등 1면2색 2조 및 보호금구 교체	오금현대1차아파트
32	신호운영실(2022.9.8.)	강동구 올림픽로 774	음향신호기 본체 1대 교체, 압버튼1대 교체	암사역
33	강동경찰서 교통과-8082 (2022.9.13.)	강동구 성안로 150	잔여시간표시기 신설 2조	강동성심병원입구
34	응답소 (20220913809034)	송파구 법원로 11길 7	보행신호등 1면 3색 교체 1조	문정테라타워
35	경정비순찰	송파구 오금동 17-20	잔여시간표시기(삼각) 교체 1조	올림픽공원
36	신호운영실(2022.9.18)	송파구 헌릉로 793	음향신호기 본체 1대, 압버튼 2대 교체, 보행자작동신호기 표지 제거 2개소	장지IC하향(연등)
37	신호운영실(2022.9.14.)	송파구 위례광장로210	음향신호기 본체 1대 교체	위례스타힐스삼거리
38	신호운영실(2022.9.16.)	송파구 오금로 300	음향신호기 본체 2대, 압버튼 2대 교체	오금현대1차아파트
39	응답소 (20220916800595)	송파구 동남로 103	음향신호기 본체 1대, 압버튼 1대 교체	문정1동 주민센터(연등)1
40	경정비순찰	송파구 거여동 567	교통신호제어기 케이블 이설	거여어울림102동앞
41	신호운영실(2022.9.20)	강동구 상암로251	음향신호기 본체 1대, 압버튼 1대 교체	명일여고앞
42	경정비순찰	송파구 새말로 134	배선점검	성화빌딩(연등)
43	신호운영실(2022.9.23)	송파구 장지동 878	음향신호기 본체 2대 교체.	송파푸르지오
44	신호운영실(2022.9.24)	송파구 위례광장로 170	배선 점검	힐스테이트송파위례
45	응답소 (20220923901282)	송파구 장지동 917-9	음향신호기 본체 1대, 압버튼 1대 교체	위례중앙푸르지오 입구삼거리
46	송파구청 교통과-62493 (2022.9.29.)	송파구 위례성대로 12길 38앞	교통신호제어기 교체 1대	LG전자체육관앞

□ 작업완료보고서 제출기한 : 2022. 11. 30.(금)

4		행정사항

□ 작업지시 내용을『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』시공사 및 감리사에 발송하여 기한내 완료토록 지시

5		보고자의견

□ 시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙임 : 1. 작업지시(4차) 설계서 1부.

2. 설계도면(별도) 1부.  끝.