문서번호	설비부-31170
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	10/31
			김호성
협 조

『신림공영차고지(저류조포함) 건설 소방공사』

준공기한 연장 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『신림공영차고지(저류조포함) 건설 소방공사』

준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『신림공영차고지(저류조포함) 건설 소방공사』와 관련하여 감리단으로부터 제출된 준공기한 연장에 대하여 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 건설 소방공사

○ 위    치 : 서울특별시 관악구 신림동 140-2일대

○ 규    모 : 12,283㎡, 버스 101대 (지하 61대, 지상40대)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
소방공사	(주)보성티엔씨	총차	2021.06.30.~2023.12.20.	966,272,200
		1차	2021.06.30.~2022.12.31.	40,000,000

○ 건설사업관리단 : (주)제일엔지니어링 외 2개사

2		관련근거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제 94조(공정관리)

○ 소방공사 준공기한 연장 검토 보고 [신림차고지(감)제2022-248호 ('22.10.26.)

3		검토내용

○ 변경내용

계약번호	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공기한
					당초	변경(연장)
20210614EBC-01	소방공사	(주)보성티엔씨	총차	966,272,200	2023.12.20.	변경없음
			1차	40,000,000	2022.12.31.	2023.11.30.

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공종(토목)의 공정추진 지연으로 후속공종(소방)의 금차분 예산(40백만원)소화가 불가능함에 따라 금차분 준공기한을 연장하는 것은 타당하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 소방공사 준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.