문서번호	시설과-663
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		북부공원여가센터소장
심다영	송석주	이철형		10/31
				구본상
협 조
	공원운영과장		代김국헌

간데메근린공원 조성계획 결정(변경) 추진계획

2022. 10.

북부공원여가센터

[시 설 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 답십리·전농동 일대 주차난 해소를 위한 지하주차장 건립에 따른 -

간데메근린공원 조성계획 결정(변경) 추진계획

동대문구의「간데메근린공원 지하주차장 건립」추진에 따라 공원조성계획 변경 결정을 추진하고자 함 ※ 지하주차장 규모: 공원 면적의 1/3

Ⅰ		추진근거

ㅇ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조(공원조성계획의 입안)

ㅇ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조2(공원조성계획의 결정)

ㅇ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제28조(주민의견 청취)

ㅇ 간데메공원 공원조성계획 결정(변경) 입안 요청[동대문구 주차행정과-26072호(`22.10.11)]

※ 8. 19.자 조직개편에 따라 업무 이관(중부→ 북부공원여가센터)

Ⅱ		추진사유

ㅇ 동대문구 답십리, 전농동 일대 주택밀집지역의 주차난 해소를 위해 간데메공원 일부(5,000m2)에 공영 지하주차장을 건립하는 사업으로

ㅇ 지하주차장 건립에 따른 계단실(2), 환기구(1), 램프(2) 등의 기타 부속시설을 공원조성계획에 반영 필요

ㅇ 그간 소규모 공원 정비로 인한 시설 변경사항 현행화

Ⅲ		공원현황

ㅇ 위    치 : 동대문구 서울시립대로2길 59(시유지)

ㅇ 면    적 : 15,179.7m2 (시설율 32.6%)

ㅇ 공원지정 : 서울특별시 고시 제1997-51호(1997.3.3.)

ㅇ 조성계획 : 서울특별시 고시 제1998-27호(1998.1.31.)

ㅇ 주요시설 : 팔각정, 농구장, 배드민턴장, 휴게공간 등

관리사무소	팔각정	북측 출입구	서측 출입구
다목적구장(농구코트)	휴게공간, 음수대	배드민턴장	산책로

Ⅳ		추진경위

ㅇ‘17.  4. : 타당성조사 용역 시행(동대문구 주차행정과)

ㅇ‘20.  9. : 서울시 공유재산심의 및 투자심사(區)

ㅇ‘21.  8. : 기본 및 실시설계용역 착수(區)

ㅇ‘21.  9. : 서울시 도시계획□공원위원회 공동자문(區)

ㅇ‘21. 12. : 도시계획시설(공원,주차장) 중복결정 고시(區)

ㅇ‘22. 10. : 공원조성계획 결정(변경) 열람공고

Ⅴ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 간데메공원 지하주차장 건설사업

ㅇ 규    모 : 5,000m2

- 주 차 장 : 지하1층 86면, 연면적 3,555m2

ㅇ 사업기간 : 2017. 4. ~ 2023. 12.

ㅇ 사업내용 : 주차장 건설, 공원 재조성(운동□휴게공간, 산책로 조성 등)

ㅇ 총사업비 : 18,456백만원(시비 12,269/ 구비 6,189)

- 설 계 비 : 555백만원

- 공 사 비 : 17,901백만원 ※공원 조성비: 1,200백만원

ㅇ 주관부서 : 동대문구 주차행정과

ㅇ 조성계획(안)

※ 해당 조성계획은 도시공원심의 결과에 따라 변경 가능

Ⅵ		향후일정

ㅇ‘22. 11.      : 제9차 도시공원위원회 심의, 주민설명회

ㅇ‘22. 12.      : 공원조성계획 변경, 실시계획인가 고시, 공사 발주

ㅇ‘23. 1. ~ 12. : 공사 시행 및 완료(동대문구 주차행정과)

Ⅶ		행정사항

ㅇ 공원조성계획 변경 도시공원위원회 심의 상정 → 공원조성과

붙임  1. 도시공원위원회 상정안건(결정조서 포함) 1부

2. 공원조성계획 결정(변경) 계획도면 1부.  끝.