문서번호	설비부-31177
결재일자	2022. 10. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	10/31
			김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

관급자재(실내조명등) 계약취소 및 재구매 검토보고

2022. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

관급자재(실내조명등) 계약취소 및 재구매 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관급자재(실내조명등) 계약취소 및 재구매 요청에 대하여 검토 보고 드림.

1		관련근거

○ 물품 다수공급자계약 특수조건 제25조(납품요구의 취소 또는 변경)

○ 물품 다수공급자계약 특수조건 제26조(납품기한의 변경)

○ 관급자재 계약취소 및 재구매 검토보고 [시립CM 제2022-418호('22.10.28)]

2		공사개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 공사기간 : 2020.06.22. ~ 2022.12.14.

○ 시 공 사 : *****************

○ 건설사업관리단 : *************************

3		검토내용

○ 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	품명	계약자	계약금액(원)	납품기한
*************** ******************	*****	******	**********	***********

○ 재구매 내용

품명	규격	수량(개)			변경금액(원)
		당초	변경	증·감
*****	********	**	**	*******	*****************
	********	***	***	*	*
	*******	**	**	*	*
	*******	*	*	*	*

○ 계약취소 및 재구매 사유

- 선행공종(건축) 준공기한이 연장(2022.09.30. → 2022.11.30.)됨에 따라 후속공종인 전기공사 관급자재 납품기한 연장이 필요함.

- 관급자재(실내조명등) 계약 건의 납품기한 연장을 검토한 결과 최대 연기 가능한 납품기한 이내 납품 및 설치가 불가하므로, 물품 다수공급자계약 특수조건 제26조 제4항에 따라 해당 계약을 취소하고 향후 동일업체와 재구매 추진 하고자함.

- 건축 실 구획 변경 및 천장 구조 변경에 따른 조명기구 수량 변경 필요함.

4		조치계획

○ 건설사업관리단의 의견이 타당하다고 판단되므로, 계약부서로 관급자재(실내조명등) 계약취소를 의뢰하고, 향후 전기공사 공정 진행사항에 따라 해당 관급자재를 재구매하고자함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.