문서번호	친환경건물과-3041
결재일자	2022. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	11/01
			서은경
협조
	주무관		장천섭

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 ZEB 본인증 용역 시행계획

2022. 10.

기후환경본부

(친환경건물과)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

ZEB 본인증 용역 시행계획

우리부서에서 추진중인 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사와 관련하여 ZEB 본인증 용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

□ 관련 근거

ㅇ 「녹색건축물 조성 지원법」 제17조(건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증)

ㅇ '20년 제로에너지건물(ZEB) 전환 시범사업 확대 추진

(기후대기과-8123호, 2020.6.12.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

ㅇ 기    간 : 2022. 3. 4. ~ '23. 1. 24.

ㅇ 규    모 : 지상1~2층, 연면적 1,788㎡

ㅇ 사업내용 : 기존 건물의 그린리모델링을 통해 ZEB 5등급 인증

ㅇ 현 공정률 : 78%

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 ZEB 본인증 용역

*****************************************

************************************************

- 산출내역 : 산출기초조사서 참고

- 예산과목 : 기후환경본부 친환경건물과, 기후변화 총괄 대응, 에너지이용 합리화, 시 소유 건물 제로에너지 전환, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 용역 과업내용

- 설계도서 검토 및 협의, 건축물 에너지효율등급 및 ZEB 본인증 관련 도서 작성

- 본인증 신청(에너지효율등급, ZEB)업무 대행 , 현장심사 대응 및 보완사항 조치

- 건축물 에너지효율등급 1++ 이상 및 ZEB 본인증 취득

□ 계약 방법

ㅇ 선정방법 : 수의계약(추정가격 2천만원 이하)

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약 법률」 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

********************

*********************************************

□ 향후 일정

ㅇ '22. 11. : ZEB 본인증 용역 계약 및 착수

ㅇ '23. 2.  : ZEB 본인증 용역 완수.

붙 임 1. 과업내용서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 3부(타견적 포함). 끝.