문서번호	운영과-26079
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	11/03
			백기영
협 조
	총무과장			이영순
	주무관			김영현
	주무관			신종진
	주무관			박근배

북서울미술관 아트라이브러리 기계설비공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

서울시립미술관

(운영과)

북서울미술관 아트라이브러리 기계설비공사 계획

'시민과 함께하는 아트라이브러리 조성' 사업과 관련하여, 조성 공사에 필요한 기계설비 공사를 추진하고자 함.

□ 추진배경

○ 북서울미술관 아트라이브러리 조성 세부 계획 (운영과-26044호,2022.11.2.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 북서울미술관 아트라이브러리 기계설비공사

○ 공사내용: 기존 주방 기계설비를 철거하고 냉·난방 및 환기 설치

(주방 급·배기팬은 음압으로 형성되어 일반공조에 부적합)

○ 기    간: 2022. 11월 ~ 12월

○ 소요예산: *********************************************

※ 도급공사(기계·가스 철거) 및 관급자재(전기히트펌프 및 공기순환기)구매

○ 예산과목: 북서울미술관 유지관리, 시설비(낙찰차액 및 집행잔액 활용)

□ 공사계획

① 계 약 명: 북서울미술관 주방 기계·가스 철거공사

- 공사내용: 기계(주방 천장 덕트 및 급수·급탕 배관) 및

가스(정압실 주방 공급관, 계량기 및 3층 가스 배관) 철거

- 계약방법: 1인견적 수의계약(추정가격 2천만원 이하 소액공사)

·근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조제1항제2호

- 계약업체: *********(주력분야 기계설비 및 가스시설 제1종 공사업)

·사유: ***********************************************************************

- 공사금액: ***********(부가세 포함)

- 공사기간: 계약일로부터 20일(전시 개관전까지 철거작업 완료)

- 행정사항: 가스 공급사 및 가스안전공사에 철거시공 결과 제출

② 계 약 명: 전기히트펌프 및 공기순환기 조달구매

- 물품내용: 기존 주방공간에 전기히트펌프(실외기·실내기) 및 공기순환기 설치

- 장비용량: ****************************************

*******************************************

****************************************

- 계약방법: 조달구매(나라장터 종합쇼핑몰 구매)

·근거: 조달사업에 관한 법률 제5조의2 및 같은 법 시행령 제11조제1항제2호

- 계약업체: ***********************************

·사유: **********************************************************************

- 계약금액: *******************************

·물품금액: 전기히트펌프************, 공기순환기************

- 납품 요구기한: 2022. 12. 31.까지(건축공사와 공정연계)

- 행정사항: 전기히트펌프(히트펌프용실내기 포함) 정수물품 등록

□ 협조사항

○ 옥상 실외기 기초 및 차폐시설 설치(건축공사분)

○ 전기히트펌프 및 공기순환기 전원공급(전기공사분)

□ 향후계획

○ 11.  3. ~  4. : 기계·가스 철거공사 발주(11월 준공)

○ 11. 10. ~ 11. : 관급자재 조달구매 의뢰(12월 준공)

붙임  1. 장비계산서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.