문서번호	토목부-33312
결재일자	2022. 11. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	11/03
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(A1, A2구간 기존시설물 철거 및 복구)검토 보고

2022. 11

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(A1, A2구간 기존시설물 철거 및 복구)검토 보고

『창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사』추진 중 기존

시설물(호안블럭, 조경석, 도수로) 철거 및 복구 실정보고 검토결과

및 조치계획을 보고 드림

1		근 거

○ 보차도교 실정보고 검토보고(A1,A2구간 기존 시설물 철거 및 복구) - 창동상계 제22-032호('22.02.16.)

2		공 사 개 요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.11.22.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

3		실정보고 검토

○ 본교(A1, A2), 램프교(A2) 기존시설물 간섭에 따른 철거 및 복구

********************************************

***********************************

****************************

***************************

□ 지장물 현황

○ 지장물 현황도

○ 현황사진

A1 호안블록 ⇒ 공사완료후 원상복구		단 면 도

A2 호안블록 ⇒ 공사완료후 원상복구		단 면 도

램프 A2 조경석 ⇒ 공사완료후 원상복구		단 면 도

○ 기존 도수로 및 배수관 현황도

- A2 강관파일 및 가시설(H-Pile+토류벽) 시공위치 기존 도수로 간섭 발생

○ 도수로 철거 및 배수계획

- 교대 하부공 시공 중 : D300mm 이중벽관을 가시설 벽체에 관통시켜

기존 집수정으로 자연배수

- 교대 하부공 완료 후 : 집수정 및 배수관을 신설하여 기존 집수정에 연결

※ 동부간선도로 지하차도공사 지장배수관 처리계획에 따라 공사 완료 후 배수처리계획은

추후 재검토

이중벽관 삽입	이중벽관(가시설 외부로 노출)

□ 물량 증·감 내역

공 종	단 위	당 초	변 경	증 .△감		비 고
**********
****	*	*****	*****	*	****
******	*	*	***	*	***
***********
********	*	**	***	***	*
******	*	*	***	***	***
*************	***	*	***	***	***
*****	*	*	**	***	**
*****	*	*	**	***	**
*****	***	*	**	***	**

□ 공사비 증·감 내역

○ 당초 : **************************************

(단위 : 천원)

공 종 명	당 초	변 경	증.△감		비 고
*******					*
*******	******	******	*	*******	****
*********	*	******	*	******	****
******************
************	**	**	***	**	****
*********	**	***	***	***	****
****************	**	******	***	******	****
********	**	***	***	***	****
********	*	***	**	***	****
*********	**	*****	***	*****	****
**************	******	******	*	******	*
****************	******	******	*	******	*
***************	******	******	*	******	*
*************	*****	*****	*	*****	*
**************	******	*******	*	******	*

□ 신규단가 협의

○ 협 의 일 : `21. 12. 08.(수)

○ 참 석 자 : ****************************

○ 협의결과 : ***************

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
******	********* ********	************ **	****************************

4		검토결과 및 조치계획

○ A1, A2 시공구간 지장시설물(호안블록, 조경석, 도수로) 철거 및 복구계획

은 적정한 것으로 판단되며 향후 설계변경시 반영하고자 하며.

○ 당초 교대부 법면보호시설은 식생매트로 설계되었으나 우천시 법면유실

우려가 있어 교대부 법면보호 및 안전성 확보를 위하여 기존 호안블록

과 동일한 콘크리트블록으로 복구 하고자 함

※ 동부간선도로 횡단 배수관(D1,000mm)은 동부간선도로 지하차도 건설공사 추진사항

및 지장물 이설계획에 따라 추후 재검토

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고 검토 보고서 1부. 끝.