문서번호	설비부-31471
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	11/04
			김호성
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

실정보고(C-ITS 재이설)에 대한 검토 보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

실정보고(C-ITS 재이설)에 대한 검토 보고

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』단계별 교통처리계획에 따라교통섬 철거 예정지에 설치된 C-ITS(지능형교통시스템) 장비에 대하여 1회 이설 완료 후 교통섬 재설치 시기가 도래됨에 따라 재이설 방안에 대하여 검토 보고함.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사

□ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵경기장교차로 일대

□ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

********************************************

**********************************

2		관련근거

□ 지능형교통시스템 재이설에 대한 검토보고 [제2자유입건 제2022-359호('22.11.02.)

3		추진경위

□ '20. 01. 15. : 지능형교통시스템 이설 협의(설비부 → 교통정보과)

□ '20. 01. 29. : 지능형교통시스템 이설 협의 회신(교통정보과 → 설비부)

▶ 이설 주체 및 비용 부담 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ '20. 02. 07. : 지능형교통시스템 이설 검토보고 (설비부)

▶ 교통섬 철거에 따른 단계별 교통처리 계획에 따라 2회 이설 추진

□ '20. 03. 19. : 지능형 교통시스템 이설 완료

□ '22. 09. 22. : 지능형교통시스템 재이설 계획 알림(설비부 → 미래첨단교통과)

▶ 교통섬 재설치에 따른 단계별 교통처리 계획에 따라 재이설 추진

4		재이설 내용

******************************************************

- 차량이 주행중 운전자에게 주변 교통상황과 급정거, 낙하물 등의 사고 등의 사고 위험 정보를 실시간으로 제공하는 시스템

- 5G 융합 커넥디드 카 V2X 서비스 구현 및 실증

- 미래교통 허브광장 조성 등 공유 플랫폼 구현

- 고도 자율협력 주행 테스트베드 조성

*************************************************

****	************* ****************	*************** ****************

************************************************************************

***	***		***
******	**************************** **************************		***
****	*********** *********** ************ ******************		*****
*********	*********** *********** ************ *******************		*****
******		*****
*************		*****
***********		*****

□ 건설사업관리기술인 검토의견

- 단계별 교통처리계획에 따라 교통섬 철거로 지능형 교통정보시스템을 이설 완료하고, 교통섬 재설치 시기가 도래됨에 따른 재이설(원상복구)에 필요한 공사비 관련 수량 및 단가산출에 대하여 검토한 결과 적정하게 산출 되었다고 판단됨.

5		보고자 의견

□ C-ITS장비는 본 사업의 설계용역 완료('18.5월) 후 설치('19.07월) 되어 이설에 소요되는 내역은 본 공사에 미반영되었으며,

□ 장비 설치 및 운영의 책임소재를 명확히 하기 위해 「서울 차세대 지능형교통시스템(C-ITS) 운영 및 유지관리용역」을 수행하고 있는 아래 업체와 수의계약함이 적정하다고 판단됨.

[ 수의계약 내용 ]

○ 관련근거 :「지방계약법 시행령」제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

○ 발주금액 : 7,134천원

○ 계약업체(예정)

- 업체명 : ********************

- 소재지 : 서울특별시 영등포구 문래동

- 업  종 : 정보통신공사업, 소프트웨어개발및공급 등

붙임  1. 교통정보과 이설협의 회신 공문 1부.

2. 건설사업관리단 실정보고 공문 1부.  끝.