문서번호	설비부-31558
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이환우		배수웅	11/04
			代김현기
협조

「동북권아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 기계설비공사」관급자재 (빌딩자동제어) 납품기한 연장 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동북권 아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 기계설비공사』

관급자재 (빌딩자동제어) 납품기한 연기 검토보고

「동북권 아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 기계설비공사」관급자재 빌딩자동제어 관련, 선행공정 지연에 따라 납품기한을 연기하고자 함.

1		관련근거

□ 관급자재  자동제어 납품기한 연장 요청  : 동북권CM-제22-368호(2022.11.04.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 :  강북구 미아동 811-2(미아뉴타운 8구역)

□ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,371.25㎡

□ 기    간 : ***********************

□ 공 사 비 : *****************

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사무소 근정

□ 시 공 사 : ㈜두형엔지니어링 외 1개사

3		검토내용

□ 계약현황 및 변경계약 내용

구분	계약번호	계약자	납품기한		비고
			당초	변경
******	***********	********	***********	**********	****

※ 관급자재 수량 및 금액 변동 없음

□ 납품기한 연장 사유

- *********************************

4		감리단 기술검토 의견

□ 선행공정 지연에 따라 납품연장이 불가피하여 납품기한을 연기하여 변경된 공정계획에 의거 적기에 납품 설치가 가능하도록 납품공사함이 타당하다고 사료됨

5		보고자 의견

□ 건설사업관리기술인의 검토의견과 같이 빌딩자동제어 납품기한을 연기함이 적정하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 공문 및 합의각서 1부.  끝.