문서번호	도시철도건축부-25778
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축공사과장	도시철도건축부장
김영준	박영동	11/04
		임우진

「별내선(8호선연장)1공구 건설공사」

승강장 안전구역 설치 추진 계획

2022.11.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

승강장 안전구역 설치 추진 계획

지하철 정거장 안전구역 확대 조성 계획('20년 방침)에 의거 별내선(8호선 연장) 1공구 암사역사공원역 승강장 안전구역 설치 추진계획에 대해 보고 드림.

□ 현황

○ "'20년 안전구역 확대조성 방침" 수립 전에 별내선 실시설계가 완료('17년) 되어 안전구역 설계 미반영됨(건축,전기) ※ 통신분야는 반영

□ 추진근거

○ 지하철 정거장 안전구역 확대 조성 계획(안)

[본부장방침, 도시철도건축부-1917('20.3.4.)호]

- 계획, 공사 중인 모든 정거장에 안전구역설치

□ 추진경위

○ '22.  6. 17. 안전구역설치 검토요청(도철건축부→건설사업관리단)

○ '22. 10.  4. 안전구역 설치 회의(건축,전기,통신분야)

(설계 미반영 사항은 분야별 설계변경을 통해 설치)

○ '22. 10. 31. 안전구역설치 협의결과제출(건설사업관리단→도철건축부)

<안전구역 분야별 설치기준> - 건축 : 반사경, 폴사인, 보조안내사인 안전구역 안내문 - 전기 : 조명 및 배관공사 - 통신 : 경광등, 비상벨, CCTV, 모니터
	(예시 : 9호선 삼전역 안전구역)

□ 추진계획

○ 설치위치 : 상·하행선 각각 승강장 말단과 계단의 중간에 설치

- 지하2층 승강장(상행선) : X19열~X20열

- 지하2층 승강장(하행선) : X09열~X10열

○ 설치시기 : 공종별 추진일정을 검토하여 추진

- 건축분야(안내사인) '23.05. 설치 예정

○ 예정공사비(안) : ********************

공종	단위	수량	재료비	노무비	합계	비고
건축공사	식	1	***********	**********	***********	추가
전기공사	식	1	**********	**********	**********	추가
통신공사	식	1	***********	***********	***********	기 내역반영
직접공사비계			***********	***********	***********

※ 분야별 감리를 통해 기반영사항 및 예상공사금액 확인

□ 세부추진계획

○ 안전구역설치관련 실정보고처리

- 내용 : 설계변경을 위한 공사내용 및 공사내역 실정보고 처리 후 '23년 6차공사 준공 정산 시 내역 반영(예정)

- 실정보고 주체 : 건설사업관리단

- 시기 : '23년 4월(예정)

□ 향후계획

○ '22. 11. 안전구역 설치 추진계획 송부(도시철도설비부)

○ '22. 11. 안전구역 설치 공사반영 실정보고 요청(건설사업관리단)

붙 임  안전구역설치 검토결과(건설사업관리단) 1부.  끝.