문서번호	환경녹지과-1832
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	녹지관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
한소진	윤희권	강병기	11/04
			이용남
협 조

하늘공원 억새 처리 계획

2022.  11.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

하늘공원 억새 처리 계획

월드컵공원의 주요 경관지역인 하늘공원 억새밭의 생육 환경 개선 및 겨울철 건조기 화재예방관리 계획을 보고드림

Ⅰ		현 황

□ 위    치: 월드컵공원 하늘공원 상부 억새밭

□ 면    적: 133,372㎡

❍ 순 초 지: 93,722㎡(억새, 띠)

❍ 혼생초지: 39,650㎡(쑥, 갈대, 개망초, 아까시나무 등)

Ⅱ		추진방향

□ 겨울철 볼거리 제공 및 야생동물 서식지 보전을 위해 일부 혼생초지는       존치하고, 건조기 화재 예방을 위해 외곽지역부터 억새 제거

❍ 공원 전망대 및 수로 주변 등 외곽지역부터 억새 제거

❍ 봄철 건조기 화재 발생 취약시기 이전에 혼생초지를 제외한 구역 억새 제거

□ 수확한 억새는 조형물 제작 등 공원 이용 프로그램에 일부 활용

□ 잔여 억새는 수요기관 사용처 조회 후 필요한 기관에 지원하고 일부는       수목 식재지 피복 재료로 활용

□ 건조기(’22.11.~’23.1.) 화재예방에 따른 순찰강화

❍ 겨울철 건조기 억새밭 주변 화재발생 요인 및 시설물 점검

Ⅲ		세부계획

≪ 억새 제거 ≫

□ 1차 제거

❍ 기  간: ’22. 11. 7. ~ 12. 9.

❍ 위  치: 전망대 인근 및 억새밭 외곽지역

❍ 면  적: 약 28,870㎡(전체면적의 약 22%)

❍ 처리방법

- 기계 작업 여유공간 확보를 위한 외곽(폭 1.5m) 억새 베기

- 경관 유지를 위한 수로 및 보행로 주변, 전망대 인근부터 점진적 제거

- 공원 이용 프로그램(조형물 제작) 및 수목 식재지 피복재료 활용

❍ 추진일정

- ’22. 11.  7. ~ 12.  9.: 억새 1차 제거

- ’22. 11. 10. ~ 11. 24.: 억새 사용 수요처 조회

□ 2차 제거

❍ 기  간: ’22. 12. 12. ~  ’23. 1. 20.

❍ 위  치: 혼생초지를 제외한 억새밭 전 지역(4개 구역)

❍ 면  적: 약 65,722㎡(전체면적의 약 50%)

❍ 처리방법

- 화재발생 취약 시기(봄철) 이전 제거 작업 완료

- 업무 효율성 증대를 위해 기계장비(억새 관리기, 예초기) 활용

- 공원 이용 프로그램 재료로 우선 활용하고, 수요기관이 있을 경우 무상 지원

❍ 추진일정

- ’22. 12. 12. ~ ’23. 1.  6.: 억새 2차 제거

- ’23.  1.  9. ~ ’23.  1. 20.: 억새 묶음 작업 및 주변 정리, 가장자리 운반작업

- ’23.  1. ~ 2.: 수목 식재지 피복, 재활용 및 잔여 억새 반출

≪ 존치구역 관리 ≫

□ 혼생초지 구역 관리

❍ 면    적: 39,650㎡(전체면적의 약 30%)

❍ 처리방법

- 환경 생태계 보전 및 경관 유지로 하되, 아까시나무 등 우점 수종이

다른 식생의 생육을 방해하지 않도록 필요 시 정비

≪ 화재예방 ≫

□ 화재예방에 따른 관리방안

❍ 기    간: ’22. 11. 7. ~ ’23. 1. 31.(겨울철 건조기)

❍ 순찰강화: (주간) 수시순찰 / (야간) 공원 폐장 이후 총 3회(20시/23시/익일2시)

- 순찰자: 공공안전관 2명(1명씩 교차 순찰 시행)

- 내  용: 억새밭 주변 화재발생 요인 및 시설물 점검

❍ 화재예방 시설: 화재 진화용 소화기 총 47대(대형 43, 소형 4)비치

등짐펌프 8개, 불털이개 4개, 불갈퀴 4개 비치

Ⅳ		기대효과

□ 화재에 취약한 마른 억새 제거로 겨울철 건조기 화재 예방 철저

□ 묵은 줄기를 동일높이로 제거하여 전체적인 경관향상 및 억새 균형생장 유도.

붙임  억새처리 계획도 및 현황사진 1부.  끝.