문서번호	계획설계과-26161
결재일자	2022. 11. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	계획설계과장		급수부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
신정우	백광인		송헌영		김권기		11/07
							이대현
협 조
	주무관					박상진

미아배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역

준공기한 연기 보고

2022. 11

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『미아배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역』

준공기한 연기 보고

미아배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역 추가 검토사항 발생으로   과업기간 연장이 필요함에 따라 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역 개요

○ 사업목적 : 미아배수지 건설공사에 따른 기본 및 실시설계

○ 사업대상 : 강북구 미아동 산 108-4일대(5,065㎥)

○ 용역기간 : ’21. 5. 4. ~ ’22. 11. 30.

○ 용 역 사 : **************

○ 용역금액 : ************

○ 공 정 율 : 82%

□ 준공기한 연기 사유

○ 급수체계 변경에 따른 월곡소배수지 계통 배수관로 추가 검토(20일)

- 월곡소 배수지~미아 급수구역(저지대) 공급 관로에 번동지역 급수구역 추가 검토(소요기간 10일)

- 월곡소배수지 공급 신설관로의 현황 확인 및 시험터파기 등

- 월곡소 배수지 계통 기존관로를 활용하기 위한 연계성 검토 및 설계반영(소요기간 10일)

○ 번동 급수구역 추가로 인한 월곡(배) 가압장 용량 추가검토 및 설계(소요기간 10일)

- 가압장개량 펌프용량 재검토 및 산정(Q=16,000㎥/일 → Q=20,000㎥/일)

- 공급량 변경에 따른 단계별 통수계획 재검토

○ 설계안전성검토, 안전보건대장 작성 및 행정절차를 위한 소요작업 필요.

□ 조치계획

○ 준공기한 연기

- 당 초 : 2021. 5. 4.  ~ 2022. 11. 30.

- 변 경 : 2021. 5. 4.  ~ 2022. 12. 30.

○ 연기사유 귀책소재 : 서울시상수도사업본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

※ 계약금액은 변경없음

○ 준공기한 연기 및 변경계약(재무회계과) 조치.

붙임 : 준공기한 연기요청서 1부. 끝.