문서번호	공원운영과-4377
결재일자	2022. 11. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		代김은주	11/08
			이인수
협조

「남산청사 노후 창호 교체공사」 관급자재(창호, 방충망) 물량 변경 검토보고

2022. 11.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 노후 창호 교체공사」

관급자재(창호, 방충망) 물량 변경 검토보고

「남산청하 노후 창호 교체공사」의 관급자재 납품기간 연장을 검토하고 그 결과를 보고하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 구매개요

○ 사 업 명 : 관급자재(창호, 방충망) 구매·설치

○ 구매내역

- 합성수지제창 단열 복합 미서기창 **************

- 합성수지제창 스테인리스 방충망 **************

○ 계약금액 : ***************************************

○ 계약기간 : 2022. 9. 2. ~ 2022. 11. 30. (계약일로부터 90일 이내)

○ 계약업체 : ******************

□ 추진경위

○ 2022. 8. 23. : 남산청사 노후 창호 교체공사 설계 및 계획 수립

○ 2022. 8. 25. : 관급자재 다수공급자 계약 2단계 경쟁 의뢰

○ 2022. 9. 1. : 도급공사 발주 및 계약의뢰

○ 2022. 9. 2. : 관급자재 업체선정 완료 및 발주 의뢰

○ 2022. 10. 4. : 도급업체 선정 및 계약 완료

○ 2022. 10. 24.  ~ : 노후 창호 교체공사 진행 중

Ⅱ		검토내용

□ 물량변경 사유

○ 현장 설치 작업 결과, 실제 설치 현장과 상이하여 ********************************************

□ 변경내역

구 분	당 초		변 경		증/감
	수량	금액(원)	수량	금액(원)	수량	금액(원)
창호	****	***********	****	***********	*****	**********
방충망	****	**********	****	**********	*****	*********
합계	******	***********	******	***********	******	**********

□ 향후계획

○ 당초 계약 물량보다 *****************함에 따라 상기 변경사항에 대하여 계약 변경을 진행하며 현장 설치 완료 후 정산 처리하고자 함

Ⅲ		행정사항

□ `22. 11. 7. ~ `22. 11. 9. : 변경계약(물량 변경) 의뢰