문서번호	도시철도설비부-27693
결재일자	2022. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장
강신영	조준규	11/08
		김중영

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사

모란차량기지 전선로 공사 외 2건 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사

모란차량기지 전선로 공사 외 2건 실정보고 검토

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구) 관련 모란차량기지 전선로 공사 외 2건 실정보고를 검토하여 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

ㅇ *************************************************************************

Ⅱ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1, 2공구)

ㅇ 규    모: 연장 12.906km, 정거장 6개소, 암사역 개량,
모란차량기지 증설 등

ㅇ 위    치: 강동구 암사동(8호선 암사역) ~ 구리시 토평동

ㅇ 공사기간

**************************************************************

*****************************************************************

ㅇ 공사내용

- [1공구] 신호보안설비공사(본선 2.8km, 차량기지 1.4km), 신호기(표지) 72기,

선로전환기 10대 설치 등

- [2공구] 신호보안설비공사(본선 10.105km), 신호기(표지) 152기,
선로전환기 10대 설치 등

ㅇ 공 사 비

- [1공구] 5,053,088천원 (1차 1,949,092천원)

- [2공구] 4,975,869천원 (1차 1,915,907천원)

ㅇ 시 공 사

- [1공구] 종합전기(주) 대표 김유훈

- [2공구] ㈜서우건설산업 대표 이종근

ㅇ 감 리 단: ㈜에이알텍 대표 이상남

Ⅲ		실정보고 내용

ㅇ 실정보고 사유

- 공사현장 여건 상 설계 내역대로의 시공이 불가피하여 시공방법의
변경 필요

ㅇ 실정보고 세부내용

1) 1공구 모란차량기지 전선로 시공방법 변경

- 당 초

① 기계실~시험선 간 전선관로 시공: 기존관로와 병렬 배치 시공(맨홀 설치,
아스팔트 깨기, 전선관 매입 등)

② 신설 전선관로: 파스콘 트로프 설치

③ 신설 전선관로 횡단 방법: 기계실~시험선~신설 유치선 구간 굴착 후
전선관 매입

- 변 경

**********************************************

***********************************************

**********************************************************

- 변경 사유

*******************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************

- 해당 공사비 증감액(직접비)

구 분	변 경 전	변 경 후	증감액	비 고
직접재료비	120,494,479	**********	***********
직접노무비	63,146,907	***********	**********
소 계	183,641,386	***********	**********	************

기존 맨홀

- 현장 사진

	시험선 방향

- 변경 전후 도면

<기계실~시험선>

<시험선~유치선>

2) 모란차량기지 신호설비 기초 규격 변경

- 당  초: 설계도서에 따라 주문 제작

- 변  경: 현장여건에 맞춰 기초 치수 변경

- 변경사유: 하수박스 등 지장물이 있어 기초치수 변경이 불가피함

- 해당 공사비 증감액(직접비): 기초치수 변경에 따른 변동금액이 소액
으로 설계변경 시 정산

- 관련 도면 및 현장 사진

3) PF궤도회로 사구간 해소에 따른 전원케이블 물량 증가

- 당  초: 신설 유치선 7선의 궤도절연 배치 및 내역 설계

- 변  경: PF궤도회로 송착전 위치 변경 및 전원케이블 물량 변경

- 변경사유: 신설 유치선의 분기부 궤도절연 위치 등 신호분야 및 궤도
분야의 도면표기가 상호 명확하지 않은 부분이 있어, 시공 시 허용거리 7m를 초과한 사구간이 발생하게 되어 이를 해소하기 위해 송착전 위치 변경 및 전원케이블 물량 증가

- 해당 공사비 증감액(직접비)

구 분	변 경 전	변 경 후	증감액	비 고
직접재료비	37,870,004	38,742,180	872,176
직접노무비	38,262,691	39,272,536	1,009,845
소 계	76,132,695	78,014,716	1,882,021	증 1,882,021

- 변경 전후 도면

Ⅳ		건설사업감리단 검토 결과

ㅇ 실정보고 사항들은 설계내역과 시공환경 간의 불일치를 해소하기
위한 것으로 변경시공 방법은 타당함

ㅇ 설계수량 및 공사비 산출내역, 낙찰률 적용 등 검토 결과 적정한
것으로 판단됨

Ⅴ		조 치 의 견

ㅇ 위 실정보고 사항에 대해 검토한 결과 건설사업감리단 검토 보고
내용이 적정하다고 판단되어 우선 승인처리 후 시공토록하고 추후
설계변경 시 반영코자 함

붙임  건설사업감리단 실정 보고서 1부.  끝.