문서번호	도시철도설비부-27791
결재일자	2022. 11. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
김태연		김이곤	11/09
			김중영
협 조
	전문관			박규영
	주무관			최정훈

별내선(8호선 연장) 정보통신공사(1-1, 1-2구간)

설계변경 자문결과 반영 검토 보고

2022. 11.

도시철도설비부

(정보통신과)

별내선(8호선 연장) 정보통신공사(1-1, 1-2구간)

설계변경 자문결과 반영 검토 보고

별내선(8호선 연장) 정보통신공사(1-1, 1-2구간) 현장여건 변경 및 본부 지시사항 등 설계변경 사항에 대한 자문(소)위원회 자문 결과를 반영하여 설계변경을 추진하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 과업내용: 별내선(8호선연장) 정보통신공사(1-1,1-2구간)

□ 사업구간: 강동구 암사동(8호선) ∼ 경기도 구리시

□ 공사규모: 총연장 6.75㎞, 정거장 3개소, 차량기지 유치선(7편성) 등

□ 계 약 자

❍ 1-1구간: 한진영상정보(주), 쿠도커뮤니케이션

❍ 1-2구간: ㈜디지팍스, ㈜창흥텔레콤

□ 감리단: 문엔지니어링(주)

□ 계약현황

(단위:천원)

구분		총차	1차	2차	잔여	비고
1-1구간	공사기간	*********** **********	*********** **********	*********** **********	*********** **********
	도급금액(천원)	*********	*********	*********	*********
	공사범위	본선 4.615㎞, 1개역(BN1) 신설, 모란차량기지
1-2구간	공사기간	**********************	**********************	***********************
	도급금액(천원)	*********	*********	*********
	공사범위	본선 2.135㎞, 2개역(BN2, BN3) 신설

Ⅱ		설계변경 자문 개최 구성

□ 자문위원회 개최

❍ 일    시: 2022.11.03.(목) 14:00 ~ 17:00

❍ 장    소: 도시철도계획부 회의실(10층)

❍ 심의사업

- 별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사

·서울교통공사~암사역간 본선 광케이블 공사 및 ESC(1,2차) 반영 등 7건

- 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사

·정보통신공사 별내선 전구간 케이블트레이(부속품) 및 ESC(1,2차) 반영 등 2건

❍ 자문위원 구성

구분		소속 및 직위	성 명	비 고
위 원 장		정보통신과장	김이곤
간 사		정보통신과 방송통신 6급	김태연
자문 위원	내부	정보통신과 방송통신 6급	박규영
		송변전과 공업 6급	박종석
	외부	서울교통공사	김동하
		안세기술 이사	이성계
		에스트래픽 이사	조덕영

□ 추진경위

❍ '22.10.27. : 설계변경 자문(소)위원회 개최 계획 보고

❍ '22.10.31. : 감리단 설계변경 자문(소)위원회 개최 일정 통보

❍ '22.11. 3. : 설계변경 자문(소)위원회 개최

❍ '22.11. 4. : 자문 결과 보고 및 감리단 자문 결과 반영 지시

별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사
구분	건 명		심의 전/후 비교		반영 여부
소계			***********	***********	*******
***	**************************		**********	**********	**
*****	*********************		***********	***********	**
*****	*******************		********	********	**
*****	*****************************		*********	*********	**
***	************************		*********	*********	**
*****	*********************		**********	**********	**
*****	***********************		**********	**********	**
***	****************		************	************	**
***	********	**	***********	***********	**
		**	**********	**********	**
별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사
구분	건 명		심의 전 후 비교		반영 여부
**			***********	***********	-
***	**************************		**********	**********	**
***	********	**	***********	***********	**
		**	**********	**********	**

Ⅲ		심의결과 자문결과

□ 자문결과(요약)

❍ 설계변경 자문결과

① 별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사

❍ 증·감액 현황

(단위:원)

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
*	**************	**************************	*************	*******	***************

※ 설계변경 유형

❶ 사업계획 변경 ❷ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ❸ 현장여건 상이(건축 구조, 용도 변경 등)

❹ 공법변경(신기술 등) ❺ 추가공사발생, 시공방법변경 ❻ 민원해결, 보수, 보강 ❼ 문화재 및 지장물 이설

❽제도 기준변경

❍ 안건별 지적사항 및 조치결과

(단위 : 원)

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
서울교통공사~암사역간 본선광케이블 공사등 7건	*************************** ********************************	***********************************	*	*
	******************************************	****************************	*******	*******	**********
ESC	**********************************************	************************************	*****	*	***	*** **

❍ 심의후 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	심의전설계변경	심의후설계변경	심의전 증감	심의후 증감	심의전후증감
*****	**************	*************	*************	**********	**********	*
*****	*************	*************	*************	***********	***********	*******
******	************	************	***********	***********	***********	*
****		***********	***********	***********	***********	*
****	**************	*************	*************	***********	***********	********

② 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사

❍ 증·감액 현황

(단위:원)

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
*	**************	********	*************	*	*************

※ 설계변경 유형

❶ 사업계획 변경 ❷ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ❸ 현장여건 상이(건축 구조, 용도 변경 등)

❹ 공법변경(신기술 등) ❺ 추가공사발생, 시공방법변경 ❻ 민원해결, 보수, 보강 ❼ 문화재 및 지장물 이설

❽제도 기준변경

❍ 안건별 지적사항 및 조치결과(특이사항 없음)

❍ 심의후 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	심의전설계변경	심의후설계변경	심의전 증감	심의후 증감	심의전후증감
*****	*************	*************	*************	*	*	*
*****	*************	*************	*************	*	*	*
*****	***********	***********	***********	*	*	*
***********	*	**********	**********	**********	**********	*
******	*	***********	***********	***********	***********	*
******	*	**********	**********	**********	**********	*
****	*************	*************	*************	***********	***********	*

□ 설계변경 추진경위(실정보고 승인)

구분	문서번호	관련내용
************	*************	************************
************	**********	******************************
************	*************	************************* ****************
************	************	*************************************** **********************************
************	*************	**************** *********************************
********** ********	******* *************** **************** ******* **************** ****************	***********************

❍ 감리 검토의견

별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사

- *****************************************************************************************************

별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사

- *******************************************************************.

Ⅳ		향후계획

□ 설계변경 자문위원회 지적사항은 적정하게 반영되었으므로 책임감리원 검토결과에 따라 설계변경 시행

□ 외부 자문위원회 수당지급(3인)

□ 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사 1차수 준공(11.30) 및 2차수 계약 시행

붙임 1. 별내선 1-1구간(설계변경 자문회의 지적사항 조치결과) 1부.

2. 별내선 1-2구간(설계변경 자문회의 지적사항 조치결과) 1부.

끝.