문서번호	설비부-31807
결재일자	2022. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		문학준	11/09
			김호성
협조

『제2자유로 입체화 기계설비공사』  설계변경(1회) 검토보고

『제2자유로 입체화 기계설비공사 』

설계변경(1회) 검토보고

2022.  11.

도시기반시설본부

(설비부)

『제2자유로 입체화 기계설비공사 』

설계변경(1회) 검토보고

『제2자유로 입체화 기계설비공사』와 관련하여 건설사업관리단으로   부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토보고 드림

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 제2자유로 입체화 기계설비공사 (월드컵경기장 교차로 일대)

ㅇ 공사기간 : 2021.10.06. ~ 2022.12.30.

ㅇ 도 급 비 : *************

ㅇ 시 공 사 : **********

ㅇ 감 리 단 : ********************

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

ㅇ 제2자유로 입체회 기계설비공사 총차(1회) 변경설계서 제출

- 제2자유입건 제2022-372호(2022.11.08.)

□ 설계변경 사유

ㅇ 실정보고사항 반영 (제2자유입건 제2022-346호, 2022.10.25.)

- 소화설비공사 : 소화기함 커버 변경설치(12개)

- 장비설치공사 : 급기팬 대수 변경(4대→3대)

- 환기덕트설치공사 : 환기루버 삭제(1개→0개)

- 배관설비공사 : 레듀샤 추가(4개) 및 배관써포트 변경(1단→2단 등)

- 고용개선지원금 적용 등

□ 주요변경 내용

ㅇ 주요 공종별 변경내용

[단위 : 원]

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
1.지하차도소화설비공사	*********	*********	**********
2.장비설치공사	**********	**********	*********
3.환기덕트설치공사	*******	*	**********
4.배수설비공사	**********	**********	************
5.고용개선지원비	*	*******	**********	******

ㅇ 도급비 변경사항

[단위 : 원]

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증·감
도급금액	***********	***********	************
관급자재비	***********	***********	*	********
총공사비	***********	***********	************

□ 건설사업관리기술자 검토의견

ㅇ 실정보고 승인사항에 대한 적용으로,

ㅇ 신규비목 내역, 단가, 고용개선지원비 적용 등 내역변경이 적정하게 반영되었음

Ⅲ		보고자 의견

ㅇ 건설사업관리기술자의 설계변경 검토의견을 확인한 결과 적정한 것으로 판단되므로, 계약부서(총무부)에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임 1.책임건설사업단 검토보고서 및 내역서 각1부.

2.변경계약 검증확인서 1부.  끝.