아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(청계천 조직진단 및 유지관리체계 효율화방안 수립 용역)

1. 치수안전과-5741(2022.11.09.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 용역 시행 중인「청계천 조직진단 및 유지관리체계 효율화방안 수립 용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 청계천 조직진단 및 유지관리체계 효율화방안 수립 용역

나. 용역기간 : 2021. 5. 17. ~ 2022. 11. 13.

다. 계 약 자 : 주식회사 투비컨설팅그룹

라. 계약금액 : 금77,000,000원

마. 준공기한 연기내역

- (당초) 2022. 5. 17. ~ 2022. 11. 13.

- (변경) 2022. 5. 17. ~ 2022. 12. 13.

바. 예산과목 : 물순환안전국 치수안전과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비,    청계천 유지관리 체계 효율화방안 수립 용역, 시설비

붙 임  1. 준공기한 연기 방침 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	치 수 안 전 과 장
주무관	박계현		청계천관리팀장	김영진		치수안전과장	11/09
손경철
협조자
시행	치수안전과-5780	(	2022.11.09	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 8층 하천관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3870	/전송	02-2133-1044	/	sinnerman@seoul.go.kr	/	부분공개(5)