문서번호	미디어콘텐츠산업과-2586
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		미디어산업지원팀장	미디어콘텐츠산업과장
조현우		한동석	11/10
			최판규
협조

「서울음악창작지원센터 철거공사 설계용역」 준공기한 연장 검토 보고

2022.  11.

경 제 정 책 실

(미디어콘텐츠산업과)

「서울음악창작지원센터 철거공사 설계용역」

준공기한 연장 검토 보고

「서울음악창작지원센터 철거공사 설계용역」에 대한 준공기한 연장 검토결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」용역계약 일반조건 제14장

제7절(계약기간의 연장)

ㅇ 서울음악창작지원센터 철거공사 설계용역 준공기한 연장 요청

: *************************************

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 서울음악창작지원센터 철거공사 설계용역

ㅇ 용역기간 : '22. 9. 13. ~ 11. 14.

ㅇ 용역금액 : ***********************

ㅇ 계 약 자 : *****************

ㅇ 용역내용 : 서울음악창작지원센터 철거공사 설계, 건축물 해체심의 인허가 대행

□ 추진경위

*************************

**************************

***************************************

**************************************

□ 계약변경 내용

ㅇ 용역 준공기간 연장                                    (단위 : 원)

**************************************************************************************************************************************

*********

:********************************************

ㅇ 준공기간 연장 귀책 소재 : 서울특별시

ㅇ 지체상금 부과 여부 : 미 부과

□ 처리의견

ㅇ 해체심의 및 허가접수 등 행정절차 이행을 위한 준공기간 연장에 따른 계약 변경을 시행하여 용역을 추진하고자 함

붙임  1. 용역 준공기간 연장 신청서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.