문서번호	토목부-33913
결재일자	2022. 11. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		한병찬	11/11
			하현석
협조
	주무관		도제경

실정보고(도로 및 교통시설물(노면표시 등) 설치) 검토 보고

[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사]

2022. 11.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

실정보고(도로및교통시설물(노면표시 등)설치) 검토 보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』 관련 올림픽대로 본선부 교통표지판, 노면표시 등 도로 및 교통안전시설물 설치를 위한 실정보고 검토보고임

[관련근거] 실정보고(도로안전시설물 관계기관 협의내용 설계반영[올대감22-215호( '22.11.08.)]

Ⅰ		사 업 개 요

○ 위    치 : 송파구 풍납동 일원(올림픽대교 남단 인근)

○ 규    모 : 램프신설 L=1,600m(교량 L=446m) / 램프이설 L=1,309m(교량 L=139m)

○ 기    간 : 2016.04.01. ~ 2022.12.31.(7차 '22.5.10.~22.12.31.)

○ 사 업 비 : 61,379백만원(7차 9,172백만원)

○ 시 공 사 : 대보건설(주) 외 2개사 / 감 리 단 : (주)이산 외 2개사

Ⅱ		추 진 경 위

○ '21.03.12. : 교통안전시설 개선 요청에 대한 검토의견 회신(경찰청→도기본)

- 차선도색, 교통안전표지판 협의

○ '22.06.28. : PC방호벽 사용처 조회(도기본→서울시설공단 외)

○ '22.09.16. : 교통안전시설 개선설치 통보(경찰청→도기본)

- 차선도색 : 유도선(Ramp-E,F) 추가

○ '22.09.22. : 올림픽대로 중앙회차로 차단시설 검토 회신(도로시설과→도기본)

- 시점부 회차로 : PC방호벽 설치

- 조각공원 : 주차장 절삭후 재포장, 가드레일 등 도로시설물 설치

- 차선도색 : 상온경화형(5종) 등

○ ‘22.10.13. : U턴램프 합동점검 실시(도로시설과, 서울시설공단, 경찰서)

○ ‘22.10.21. : 교통안전시설 변경(보완)통보(경찰청→도기본)

- 차선도색 : 유도선(Ramp-H,J) 추가

- 규제봉 : Ramp-E시점 합류부 설치

- 교통안전표지판 : 조각공원 회차로 설치

Ⅱ		검 토 내 용

○ 실정보고 검토

- 도로 및 교통시설물 관계기관(도로시설과 및 경찰서) 협의내용 반영

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

< 도로 및 교통시설물 설치계획 >

****

- PC방호벽 처리

• 올림픽대로 교통전환 공사완료에 따라 회차로 차단을 위한 물량(17개)을 제외하고 잔여 수량은 폐기물 반출 조치(※ '22.6. 수요처 조회)

<PC방호벽 처리계획>

****************************************************************************************************************

○ 공사비 검토

- 공사비 증·감 현황

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 신규비목  : 설계단가 × 협의율******** 적용

발주처(안)	시공사(안)	적용	비고
**********	********	**********	*************

*****************************************************

**********************************************

**********************************************************

- 예산조치 계획

• 총사업비(61,379백만원) 범위내에서 시행 가능

• 사업비(공사비) 확보 계획[토목부-25884('22.6.29.)] : 56,399백만원→61,379백만원(증 4,980)

Ⅲ		조 치 의 견

○ 올림픽대로 본선부 교통표지판, 노면표시 등 도로 및 교통시설물 설치를 위한 관계기관 협의내용을 설계에 반영하고자 하는 사항으로 책임건설사업관리기술인의 검토의견과 같이 적정한 것으로 판단되므로 설계변경 자문회의(소위원회)를 거쳐 설계변경 반영 조치코자 함.

붙임  실정보고서 1부.  끝.