문서번호	건축부-32745
결재일자	2022. 11. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이랑		代고병연	11/11
			신명승
협조

『시립서대문농아인복지관 별관 건립공사』

2차 공사 계약시행 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립서대문농아인복지관 별관 건립공사』

2차 공사 계약시행 검토보고

「시립서대문농아인복지관 별관 건립공사」관련 건설사업관리단으로부터 2차 계약시행 요청이 있어 다음과 같이 검토보고 드림.

1		공사개요

○ 사 업 명: 시립서대문농아인복지관 별관 건립공사

○ 위    치: 서대문구 남가좌동 295-18 외 2

○ 공사개요: 지하2층/지상9층, 연면적 3,455.96㎡, 별동 증축

******************************************

********************************

******************************

*********************************

2		추진경위

○ 2017. 9.  19.: 시립서대문농아인복지관 별관 건립 변경계획 수립

○ 2019. 12. 16.: 설계용역 착수

○ 2020. 12.  9.: 설계용역 완료

○ 2021.  5. 11.: 공사 착공

○ 2021.  9. 30.: 기존건축물 해체공사(지상)완료

○ 2022.  3. 25.: 시립서대문농아인복지관 별관 건립 변경계획 수립 통보

○ 2022.  5. 31.: CIP 및 PHC파일 공사 완료

○ 2022. 11. 11.: 흙막이가시설 공사 및 1차 공사 완료(예정)

2		2차 계약 시행 검토

ㅇ 관련근거

- 2차수 계약 요청의 건(혜원까치(서농)제2022-323호(2022.11.10.)

ㅇ 시행내용

구 분	계약금액(원)	공사기간	비 고
**	*************	********************
**	*************	**********************	*********
**	*************	**********************	*******

3		건설사업관리단 검토의견

○ 원활한 사업추진을 위해 2차 계약시행코자 함.

4		처리의견

○ 건설사업관리단으로부터 제출된 검토보고 내용이 적정하므로 2차계약을 시행하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙임:  2차 계약 시행 요청(감리단) 1부.